함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	지체상금 면제 요청(은평학습장 싸인몰 설치공사)

1. 평생교육과-1579(2014. 2.21)호와 관련입니다.

2. 은평학습장 싸인몰 설치공사와 관련 아래와 같이 지체상금 면제를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2013년도 은평학습장 싸인몰 설치공사

나. 계약업체 : 씨엠에드(서울시 용산구 한강대로 117)

다. 계약금액 : 금7,419,500원(금칠백사십일만구천오백원)

라. 계약일자 : 2013.12. 5

마. 납품기간 : 2013.12. 5 ∼ 2014. 1.13

바. 지체기간 : 2014. 1.13 ∼ 2014. 2.19(36일간)

사. 면제사유 : 해당업체에서 기한내 납품이 가능하였으나 은평학습장 인테리어공사 계약 변경과 도로변 간판설치에 은평구청 협의에 따른 우리부서 요청으로 납품이 지연되었기에「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제90조에 의거 지체상금을 면제토록 선처 바랍니다. 끝.

	평생교육과장
주무관	송계수		평생교육기획팀장	송인상		평생교육과장	02/21 김정호
협조자
시행	평생교육과-1589	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문동 별관 1동)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3964	/전송	2133-1013	/	ks8934@seoul.go.kr	/	대시민공개