함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 정수슬러지 재활용처리용역 사업 지연에 따른 업무 참고사항 통보

1. 생산관리과-6524(’16.5.11)본부장 방침 관련입니다.

2. 금년 6월부터 정수슬러지 페기물의 친환경 재활용 사업을 첨부 계약   방법 등에 따라 추진코자 하였으나 아래와 같은 사유로 정수슬러지재활용 사업 추진이 지연되고

있어 금년에는 추진이 불가하고, ’17년 초 부터 추진이 가능할것으로 판단됩니다.

3. 이와 관련 금년에는 전량 현재 배출중인 페기물처리업체로의 배출이 이루어져야 하오니 이를 감안하여 게약물량 조정 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

◾ 재활용 계약 추진가능 시기

- 넥스트윅 : ’17. 3월,     - 청우에코건설(주) : ’17. 1월

◾ 지연사유 : 업체 공장건설 추진 지연(인.허가지연 등)

◾ 당초 재활용처리용역 발주물량

(톤/2년)

※ 향후 재활용처리용역 계약시 계약물량은 처리 가능량에 따라 재조정

첨부 : 관련방침서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강북아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	09/05 구자훈
협조자
시행	생산관리과-12578	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개