문서번호	기반시설과-3530
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전문관	기반시설과장
이건용	석대창	09/05 박일연

작업완료 검사 결과 보고(6차)

-2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)-

2016. 9.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(6차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)]

『한강분수 유지보수 공사(연간단가)』의 6차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : 거삼조경(주) 대표 예종서

◯ 계약기간 : ‘16.3.29. ~ ’16.12.31.

◯ 도급금액 : 450,469천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16. 08. 11.

◯ 작업 기간 : ‘16. 08. 11. ~ 08. 31.

◯ 작업 비용

- 6차: 금20,413,000원(금이천사십일만삼천원)

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
6	218,282	20,413	238,695	211,774
	48.46%	4.53%	52.99%	47.01%

◯ 작업 내용

- 계약 물량

․ 여의도 물빛광장 : 시설 및 시스템 긴급 점검, 통신판넬 설치, 제어SYSTEM                             수정, 수중케이블 신설

․ 여의도 수상분수 : 시설 및 시스템 긴급 점검, 분수대 청소

․ 여의도 안개분수 : WATER CONTROL VALVE 교체

․ 난지   거울분수 : 분수 연출 프로그램 수정

․ 난지 물놀이장외 2개소 : 시설 및 시스템 긴급 점검

□ 작업 완료 보고(거삼조경(주))

◯ 일    자 : ‘16. 08. 31.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16. 09. 01. (목)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 2명(이건용, 김동현)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

물빛광장 통신판넬 설치	안개분수 water control valve 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 1부.  끝.