투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산)시행

1. 2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이

설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2013.3.1 ~ 2014.2.28

다. 도 급 자 : ####################

라. 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리,기전시설물관리,

한강교량 및 1종시설물 경관조명 유지보수,시설비 및 부대비,시설비

마. 설계변경내역

[ 단 위 : 원 ]

구 분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
총공사비	26,521,287	26,150,000	감 371,287
도 급 비	26,521,287	26,150,000	감 371,287

바. 설계변경 사유 : 작업지시에 따른 주요물량 변경사항(증,감)반영 및

보험료(건강,연금,노인장기요양)정산에 따른 감액.

붙 임 : 1. 설계변경 계획 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	하상철		주무관	한영호		기전과장	02/21 박재경
협조자	주무관	윤신식
시행	기전과-1998	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화	02-2657-7962	/전송		/		/	부분공개(6)