문서번호	설비부-2089
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김경남	조예환	02/21 박기형

『송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

준공기한(1차) 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

준공기한(1차) 연기 검토보고

송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사 1차분에 대한 시설관리공단 으로부터 공사 준공기한 연기 요청이 있어 이에따른 검토보고임.

공사개요

❍ 공사명 : 송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사

❍ 위  치 : 성동구 송정동 81-5(송정), 사근동 198-5(사근)

❍ 기  간 : '13. 05 ~ '14. 07

❍ 공사금액 : 234,218천원(1차 110,000천원)

❍ 규  모

- 송정 : 수펌프 1,500A×308㎥/min×670kw(900HP) 2대 증설

- 사근 : 수펌프 2,000A×510㎥/min×1,200kw(1,600HP) 2대 증설

❍ 시공사 : 주신공영(주)

❍ 감리사 : 시설관리공단

관련근거

❍ 준공기한 연장 검토보고 : 시설관리공단 위탁감독

→ 강북공사관리3처-1357(2014.02.20)

시설관리공단 보고내용

❍ 공사기한 연기

구 분	당 초		변 경		비 고
	총차	1차	총차	1차
계 약 자	주신공영(주)		변경사항 없음
계약금액	234,218,148원	110,000,000원	변경사항 없음
공사기간	2013.05.08. ~ 2014.07.20	2013.05.08.~ 2014.02.28	변경사항 없음	2013.05.08.~ 2014.07.20

❍ 연기사유 : 선행 공종(토목.건축) 지연에 따른 기계공사 연기 필요

❍ 연기사유 귀책 : 도시기반시설본부

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

※ 총차계약 공정의 2차 계약분 시행시기가 도래하여 차수계약이 필요함

검토의견

❍ 지연되고 있는 선행 토목.건축공사 공정에 맞추어 기계공사 시행을 위해 1차 준공기한 연기가 필요한 사항으로 원활한 사업추진을 위하여 시설관리공단 보고내용과 같이 준공기한 연장하고, 건설총괄부에 1차 계약변경 및 차수(2차)계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 시설관리공단 준공기한 연기 검토보고서 1부.   끝.