문서번호	시설보수과-3394
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	09/06 이종엽
협조

설계변경(1차) 검토 보고

[ 2016년 교량 및 고가 일상유지보수공사 ]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

성동도로사업소

( 시설보수과 )

설계변경(1차) 검토 보고

(2016년 교량 및 고가 일상유지보수공사)

우리 사업소에서 시행 중에 있는『2016년 교량 및 고가 일상유지보수공사』의 시공물량 증․감 및 신규공종 발생 등에 따른 설계변경을 시행하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

공사개요

공 사 명 : 2016년 교량 및 고가 일상유지보수공사

공사기간 : 2016. 04. 07 ~ 12. 31

사업개요

○ 콘크리트 균열보수   L=1,966m

○ 콘크리트 표면보수   A=2,758㎡

○ 콘크리트 단면보수   A=1,012㎡

도 급 액 : 828,679,900원

도 급 자 : 아하엔지니어링(주) 대표 김보영

Ⅱ

보고내용

설계변경 사유

▶ 공사비 변경 없고 시공물량 증 ․ 감에 따른 변경

▶ 칼라아스콘 포장 등 32개 신규공종 발생

주요 공종 물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
콘크리트 균열보수	건식,습식,침투식	m	1,966	1,250	감)716
콘크리트 표면보수	T=1~3㎜	㎡	2,758	2,500	감)258
콘크리트 단면보수	T=10~30mm	㎡	1,012	620	감)392
교면방수	도막식	㎡	-	1,330	증)1,330
칼라아스콘 포장	적색, 교량	㎡	-	400	증)400
교량중앙분리대 설치	관절형, 2단, W2000	경간	-	115	증)115

공사비 변경내역 – 총공사비 변경없음

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		1,066,659,900	1,066,659,900	-
도급비	계	828,679,900	828,679,900	-
	공급가액	753,345,364	753,345,364	-
	부가가치세	75,334,536	75,334,536	-
관 급 비		180,684,000	180,684,000	-
이 전 비		57,296,000	57,296,000	-

예산과목

▶ 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 도로시설물(교량)일상유지보수,

시설비및부대비, 시설비.

Ⅲ

조치의견

상기 내용과 같이 시공물량 증 ․ 감 및 신규 공종 발생에  따라 『2016년 교량 및     고가 일상유지보수공사』의 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 :  설계변경 내역서 1부. 끝