문서번호	도시철도사업부-8381
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공정관리과장	도시철도사업부장		도시철도국장
권순환	김형건	박동룡		09/06 이정화
협 조
	도시철도설비부장		정찬웅
	건축계획과장		송종훈
	경전철1과장		代위성환
	주무관		신익현

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제18차)

2016. 9

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제18차)

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 공사중단 및 사업재개로 인한 사업추진 및 공정관리 확인을 위하여 제18차 통합 공정회의를   개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘16. 9. 2.(금) 16:30~18:00

○ 장    소 : 도시철도국 회의실(10층)

○ 참 석 자 : 37명

- 본  부 : 도시철도국장, 도철사업부장, 도철건축부장, 도철설비부장, 분야별 담당과장, 총괄 업무담당

- 사 업 자 : 법인 기술팀장, 건설사업단장, 건설사업단 시운전 총괄, 책임감리원 및 현장소장(1~4공구, 시스템)

□ 회의결과

○ 보고현황

- 보고방법 : 회의 자료에 의거 법인 기술팀장, 건설사업단 시운전 총괄, 각 공구 현장소장이 보고

- 보고내용

· 분야별 공정 추진현황

· 현안사항 및 부진공정 만회대책

· 지시(협조)사항에 대한 조치결과 및 건의사항 등

○ 분야별 요구(협조)사항

<시스템분야>

- 2017년 3월31일 까지 모든 공사가 완료되어 철도종합시험에   차질이 없도록 조치 요함

○ 주무관청 및 법인 요구(협조)사항

<도시철도국장>

- 어려운 여건하에 다들 고생하고 있으며, 고생이 헛되이 되지 않도록 모두 힘을 모아 사업을 추진하여 주기 바람

- 내년 7월 개통에 차질이 없도록 각 공구에서는 필요하면 야간공사, 돌관공사 등 적극적으로 공사를 추진하여 주기 바람

- 공구별 AFC관련 건축마감 일정 등 정리하여 자료제출 및 보고

⇒ 법인 및 건설사업단에서 자료 수합 및 검토 보고

<도시철도사업부장>

- 모든 토목 구조물은 ‘16년 12월말까지 완료하고 건축 및 설비는 ’17년 3월까지 완료하여 개통에 차질이 없도록 조치 할 것

- 법인 운전․운영계획에 대하여 수시로 사전협의하여 승인업무에  차질이 없도록 할 것

- 추석 연휴 대비 양수기 점검 등 풍수해 대책에 만전을 기하여 주기 바람

- 우이 1, 2공구 보도 공사범위, 브럭 재질에 대하여 검토하여 공사에 차질이 없도록 조치 할 것

⇒ 우이 1, 2공구에서 검토 및 조치

- 공사완료 계획을 ‘17. 7월로 발표하였으므로 상세공정계획 작성 제출

⇒ 법인 및 건설사업단에서 자료 작성 및 제출

<도시철도설비부장>

- 시스템 현안사항(AFC 및 전차선 시공 지연) 조속히 처리하여 주기 바람

- 정거장명이 빨리 결정될 수 있도록 관련부서와 적극 협의하여 주기 바람

□ 향후계획

○ 금회 공정회의시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로  조치결과를 차기 공정회의 시 보고

○ 차기 공정회의는 일정계획 수립 후 각 부서 및 공구에 통보

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 통합 공정회의 사진 1부.