문서번호	시설보수과-1189
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이훈욱		정재현	02/21 이승진
협조

공사 설계변경(제3회) 검토보고(2013. 도로시설물 일상유지 보수공사)

2014. 2

북부도로사업소

(시설보수과)

공사 설계변경(제3회) 검토보고

2013. 도로시설물 일상유지 보수공사(연간단가) 작업지시(12~14차)한 사항에 대한 설계변경(3회) 검토 보고임.

1. 공사개요

공 사 명 : 2013. 도로시설물 일상유지 보수공사

공사규모 : 콘크리트 표면보수 3,900㎡,   콘크리트 단면보수  1,359㎡

철근노출 단면보수   340㎡,   콘크리트균열보수 1,041m,

공사기간 : 2013. 4. 15 ～ 2014. 2. 28

총공사비 : 1,562,821,840원(도급비 1,378,484,900원, 관급비 164,336,940원, 이전비 20,000,000원)

계 약 자 : (주)일육이엔씨 대표 정낙영

2. 작업지시 내역

‘14.01.22 : 12차 작업지시(시설보수과-484호)

- 정릉천2복개구조물 단면보수 등

‘14.01.29 : 13차 작업지시(시설보수과-643호)

- 당현천복개구조물 조인트 설치

‘13.02.10 : 14차 작업지시(시설보수과-896호)

- 구기터널(방음벽 보수 등) 외 7개소

3. 관급자재 정산

․ 아스콘(WC-2t13mm, 표층용) : 2,026톤 → 변경 1633.5톤

4. 주요 변경사항

주요공종 물량(증․감) 내역

공 종	당 초	변 경	증․감	변경내용
콘크리트 표면보수	2,143㎡	2,027㎡	감) 116	∘물량 증․감에 따른 변경사항
콘크리트 단면보수	667㎡	705㎡	증) 38
콘크리트 균열보수	746m	708m	감) 38
철근노출 단면보수	97㎡	125㎡	증) 28

설계변경(제3회) 증․감내역

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	1,562,821,840원	1,514,260,020원	감)48,561,820원
도 급 비	1,378,484,900원	1,378,484,900원	-
관 급 비	164,336,940원	132,499,700원	감)31,837,240원
이 전 비	20,000,000원	3,275,420원	감)16,724,580원

※ 예산과목 : 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설(교량관리)일상유지보수, 시설비(401-01)

5. 조치의견

금회 설계변경(제3회)은 작업지시(12~14차)사항에 대한 물량증․감과 관급자재(아스콘)  및 이전비에 대하여 별첨 설계변경 내역과 같이 시행코자 합니다.

붙 임 : 1) 설계변경 내역(제3회) 1부.  끝.