문서번호	사회혁신담당관-10653
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		혁신파크조성팀장	사회혁신담당관
김범철		장충근	09/06 이회승
협조
	주무관		김승환

- 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수사업 -

설비공사 시설물 인수·인계 검토보고

2016. 9.

서울혁신기획관

(사회혁신담당관)

- 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수사업 -

설비공사 시설물 인수·인계 검토보고

□서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수사업 설비(기계‧전기‧통신)공사□가 준공됨에 따라 시설물 인수인계를 시행하여 서울혁신파크 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수사업 기계‧전기‧통신공사

❍ 공사위치 : 서울시 은평구 통일로 684(서울혁신파크 5‧7‧16‧19‧21동)

❍ 공사개요

- 기계공사 : 냉·난방공사 1식, 가스공사 1식, 위생설비공사 1식, 소방(기계)공사 1식

- 전기공사 : 옥외간선공사 1식, 동력·전등·전열 설비공사 1식, 소방(전기)설비 공사 1식

- 통신공사 : 정보통신 설비공사 1식

❍ 공사기간 : ’15.12. ~ ’16.07.27.

❍ 시 공 사

- 기계공사 : ㈜선진콘트롤 엔 엑세스 대표 박종선 외 1인

- 전기공사 : ㈜한양산전 대표 윤용호 외 1개사

- 통신공사 : 중앙케이블네트워크㈜ 대표 노상우

□ 추진경위

❍ ’15.08.08. : 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 시행계획 수립

❍ ’15.10.19.~11.18. : 실시설계 용역

❍ ’15.12.02. : 기계‧전기‧통신공사 발주계획 수립

❍ ’15.12.16.~12.23. : 기계‧전기‧통신공사 계약(~’16.02.29.)

❍ ’16.02.22. : 기계‧전기‧통신공사 준공기한 연기 검토

․변경내용 : 준공 기한 연장(’16.02.29.→’16.04.27.)

․변경사유 : 선행 공종인 건축공사 지연에 따른 준공기한 연장

❍ ’16.04.25. : 기계‧전기‧통신공사 준공기한 연기 검토

․변경내용 : 준공 기한 연장(’16.04.27.→’16.07.27.)

․변경사유 : 선행 공종인 건축공사 지연에 따른 준공기한 연장

❍ ‘16.07.05. : 통신공사 준공

❍ ‘16.07.27. : 기계‧전기공사 준공

□ 검토결과

❍ 냉‧난방공사 등 기계공사, 옥외간선공사 등 전기공사 및 통신공사 완료현장 확인 결과 이상없음

: 인수하여 유지관리기관(서울혁신센터)에 인계 실시

□ 조치사항

❍ 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수사업 기계‧전기‧통신공사 인수인계서 날인․송부

: 도시기반시설본부⇔서울특별시

❍ 서울혁신파크 유지관리기관인 서울혁신센터에 시설물 인계

: 서울특별시⇔서울혁신센터(인계인수서 발송․날인요청)

붙임 : 1. 시설물 인계인수서(도시기반시설본부⇔서울특별시, 서울특별시⇔서울혁신센터) 각 1부.

2. 시설물 인계인수 목록 1부.

3. 준공사진대지 각 1부.  끝.