문서번호	정보기획담당관-14054
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	인터넷정책팀장	정보기획담당관
서은지	허정미	09/06 이기완

「2016년 서울시 정보접근성 품질인증 및 실태조사 사업」

월간업무보고(8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

정 보 기 획 관

(정보기획담당관)

「2016년 서울시 정보접근성 품질인증 및 실태조사 사업」

월 간 업 무 보 고 (8월)

「2016년 서울시 정보접근성 품질인증 및 실태조사」사업의 ‘16년 8월 추진실적 및 차월 계획을 보고함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 서울시 정보접근성 품질인증 및 실태조사

○ 사업기간 : ‘16. 7.14. ~12.13.(5개월)

○ 사업내용 : 시 및 산하기관 운영 웹 및 앱 정보접근성 품질인증 및 실태조사

□ 추진실적

○ 추진기간 : 2016. 7.14. ~ 8.31.

○ 추진기간 : 계획(32%)/실적(32%)

○ 추진내용

업무구분	추진내용	실적	비고
사업관리	착수보고 완료	100%
	수행계획서 작성	100%
품질마크	신규 3개	13%	역사박물관, 계약마당, 은평병원 웹접근성 품질마크 획득
	갱신 0개	0%
실태조사	홈페이지 25개	25.5%
	공공앱 12개	24.5%

구분	합계	품질마크		실태조사		조사 제외	총계
		신규	갱신	웹	앱
조사대상(당초)	186	25	11	102	48	18	204
조사대상(변경)	181	23	11	98	49	24	205
조사완료(8월)	40	3	-	25	12
조사예정	141	20	11	73	37

※ 품질마크 및 실태조사 대상 앱 추가 등 조사대상 변경 예정

□ 차월계획

	품질마크 신규		품질마크_갱신		웹 실태조사		앱 실태조사
	사이트명	심사일자	사이트명	심사일자	사이트명	심사일자	앱 명	심사일자
계	7		2		24		12
1	한성백제박물관	9/1~6	서울시 대표	9/1~5	서울안전누리	9/1~7	My Seoul	9/1~7
2	우리마을가게상권분석	9/1~6	서울대공원	9/19~21	참여예산낭비신고센터	9/1~7	서울교통포털	9/1~7
3	서울 부동산정보 광장	9/1~6			서울종합방재센터	9/1~7	서울주차정보	9/1~7
4	상수도사업본부 (영어)	9/1~6			자동기상관측시스템	9/1~7	모바일서울	9/8~13
5	평생학습포털	9/9~13			재활용나눔장터	9/1~7	서울시 엠보팅	9/8~13
6	농업기술센터	9/9~13			자원회수시설	9/1~7	문화유산스탬프 투어	9/8~13
7	천만상상오아시스	9/9~13			상생교류협력	9/8~13	꼼꼼한 서울씨	9/19~23
8					서울책방	9/8~13	50+서울 모바일	9/19~23
9					농업기술센터	9/8~13	금연도시서울	9/19~23
10					시민상	9/8~13	내 손안에 서울	9/26~30
11					외국어표기사전	9/8~13	서울일자리모바일앱	9/26~30
12					서울특별시 햇빛지도	9/8~13	서울시실내지도서비스	9/26~30
13					서울좋은간판	9/19~23
14					새주소안내시스템	9/19~23
15					원전하나줄이기	9/19~23
16					실내환경관리시스템	9/19~23
17					법인세무조사인터넷신고	9/19~23
18					서울실내지도서비스	9/19~23
19					난지미술창작스튜디오	9/26~30
20					지반정보통합관리시스템	9/26~30
21					생활권계획	9/26~30
22					3차원 공간정보시스템	9/26~30
23					서울공공와이파이	9/26~30
24					서울 우수디자인공공인증제	9/26~30

붙임 : 1. 월간업무 보고서(8월) 1부.
2. 주간업무보고서(8월 2주, 3주, 4주, 5주) 각 1부.
3. 평가종합보고서(8월) 1부.
4. 산출물 목록(변경) 1부.  끝.