문서번호	시설보수과-7477
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		代유태용	09/06 김용제
협 조
	주무관			유태용
	주무관			윤동원
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

'16년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(제1~8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

‘16년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(제1~8차)

관내 도로시설물의 손상, 파손부위에 대한 보수를 위하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

나. 공사기간 : 2016. 4. 8 ~ 12. 31

다. 계약금액 : 1,923,822천원

라. 공사개요 : 포장보수 A=200a, 교면방수 A=1,600㎡ 신축이음보수

L=220m, 기타 1식

마. 계 약 자 : 백토건설㈜ 대표 이인수

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

차수	근거	작업지시	작업기간	작업완료	비고
1차	시설보수과-3917	2016.5.12	2016.5.16.~6.15	2016.6.7
2차	시설보수과-4262	2016.5.24	2016.5.25.~7.29	2016.7.21
3차	시설보수과-4329	2016.5.26	2016.5.30.~7.11	2016.6.22
4차	시설보수과-4762	2016.6.10	2016.6.15.~7.20	2016.7.7
5차	시설보수과-4922	2016.6.16	2016.6.20.~8.26	2016.8.26
6차	시설보수과-5076	2016.6.21	2016.6.24.~7.23	2016.7.21
7차	시설보수과-5469	2016.7.1	2016.7.1.~7.15	2016.7.7
8차	시설보수과-5703	2016.7.8	2016.7.8.~8.16	2016.7.28

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	1	외발산지하차도	측구배수로	인력준설	13.43㎡	인력준설	13.43㎡
	2	등촌지하차도	측구배수로	인력준설	9.67㎡	인력준설	9.67㎡
	3	고척2지하차도	측구배수로	인력준설	13.94㎡	인력준설	13.94㎡
	4	가마산지하차도	측구배수로	인력준설	8.44㎡	인력준설	8.44㎡
2차	1	오금지하차도	슬래브하면 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	2.0㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	2.0㎡
	2		고척교방향 그레이팅 유실	스틸그레이팅 설치	1㎡	스틸그레이팅 설치	1㎡
	3		박스입구 옹벽부 타일탈락 및 콘크리트 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.17㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.17㎡
	4		박스입구 옹벽부 타일탈락 및 콘크리트 박리박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.44㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.44㎡
	5		중앙분리대 연석부 도장 박리	안전 빗금도색	422㎡	안전 빗금도색	421.9㎡
	6	구로지하차도	고척교방향 그레이팅 이격	그레이팅 정비	1회	그레이팅정비	0.5회
	7	염창IC하부 복개	복개하부 기둥 균열 및 박리	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.30㎡	콘크리트 단면보수(T=30mm)	0.30㎡
	8		복개 난간 연석부 콘크리트 박리박락 및 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	2.34㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	2.34㎡
	9	신정교접속교	교대 상부 콘크리트 박리박락 및 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.70㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.70㎡
	10		교대 상부 콘크리트 박리박락 및 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.03㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.03㎡
	11	가리봉철도고가	보도육교 교각 철근노출 및 부분 파손	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡
	12		슬라브(S10) 하면 철근노출 및 박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.49㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.49㎡
	13		교명주 전도 및 이탈	기존위치에 재설치(일일노무)	1회	기존위치에 재설치(일일노무)	0.5회
	14		교대 A2측 하부 슬라브 누수에 의한 표면열화	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡
	15		교대 A2측 캔틸레버부	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.90㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.90㎡
	16		교대 A2측 캔틸레버부	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.75㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.75㎡
	17	도림교(구로)	교대(A2) 표면 백태	콘크리트 표면보수	54.60㎡	콘크리트 표면보수	247.0㎡
	18		교대(A1) 표면 백태	콘크리트 표면보수	247.0㎡	콘크리트 표면보수	247.0㎡
	19		하부 슬라브 콘크리트 박리	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.50㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.50㎡
	20	오금교	교대 A2 받침장치 부식 및 녹 발생	슈청소공	10개소	슈청소공	10개소
	21		교각 P1측 배수관 파손	강관배관	48.0m	강관배관	48.0m
	22			곡관배관	6개소	곡관배관	6개소
	23			레듀사	3개소	레듀사	3개소
	24		하부 슬라브(A2측) 콘크리트 박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.56㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	1.56㎡
	25	오목교	교각(P9) 철재앵글방치	철재앵글철거	1회	철재앵글철거	0.5회
	26		교대A2 호안블럭침식 및 배수관 길이 부족	호안블럭재정비	1회	호안블럭재정비	0.5회
	27			강관배관	11.0m	강관배관	11.0m
	28			곡관배관	3개소	곡관배관	3개소

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
2차	29	오목교	교대A2 호안블럭침식 및 배수관 길이 부족	레듀사	1개소	레듀사	1개소
	30	오목교 동측 지하보차도	지하보차도 파라펫 빗물에 의한 표면 백태	콘크리트 표면보수	55.0㎡	콘크리트 표면보수	55.0㎡
	31			물끊기공 설치(AL)	11m	물끊기공 설치(AL)	11m
	32		박스 내부 신축이음부 누수에 의한 백태	콘크리트 표면보수	5.60㎡	콘크리트 표면보수	5.60㎡
	33	광복교	A1측 호안블럭 부분 유실	호안블럭 정비	1식	호안블럭 정비	10.36㎡
	34	공단I/C	C램프 상부 노면수 물고임	천공 후 배수 그레이팅 설치	1개소	천공 후 배수 그레이팅 설치	1개소
	35			강관배관	13m	강관배관	14.5m
	36			곡관배관	2개소	곡관배관	2개소
	37			레듀샤	1개소	레듀샤	1개소
	38		C램프 옹벽 틈사이 벌어짐	옹벽 이음부 수밀코킹	4m	옹벽 이음부 수밀코킹	5m
	39			차수조인트 설치	4m	차수조인트 설치	5m
	40		B램프 거더 하부 누수에 의한 백태	콘크리트 표면보수	15㎡	콘크리트 표면보수	15㎡
	41			물끊기공 설치(AL)	25m	물끊기공 설치(AL)	25m
	42		B램프 점검통로 훼손	점검통로보수 (일일노무)	1회	점검통로보수 (일일노무)	0.5회
	43	신도림지하차도	BOX구간 신축이음 유도배수로 주변 누수	누수부 수밀코킹	1m	누수부 수밀코킹	1m
	44	구로역지하차도	인도구간 장애인 점자블럭 및 화강블럭 파손	장애인 점자블럭 보수	0.06㎡	장애인 점자블럭 보수	0.06㎡
	45			화강블럭 보수	0.06㎡	화강블럭 보수	0.06㎡
	46		인도구간 화강블럭 파손	화강블럭 보수	0.12㎡	화강블럭 보수	0.12㎡
	47	도림천복개 (좌안)	하부(P58) 신축이음 하부 콘크리트 발락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.12㎡
	48		상부(J3) 교통안전시설 노후 및 훼손	갈매기표지판교체	2개소	갈매기표지판교체	2개소
	49			도로표지병설치	10개소	도로표지병설치	10개소
	50		상부(J2) 신축이음장치 돌출	신축이음 후타재보수	3.0m	신축이음 후타재보수	3.0m
	51	도림천하류복개	시점부 표면보수재 들뜸	콘크리트 표면보수	99.6㎡	콘크리트 표면보수	99.6㎡
	52		시점부 빗물에 의한 표면 백태	콘크리트 표면보수	11.34㎡	콘크리트 표면보수	830.0㎡
				물끊기공 설치	60m	물끊기공 설치	60m
	53	개화I/C	교통안전 점멸기 부점등	SOLAR점멸기 (경보등) 설치	2개소	SOLAR점멸기 (경보등) 설치	2개소
	54		높이제한 표지판 탈색	높이제한 표지판 재설치	2개소	높이제한 표지판 재설치	2개소
	55	화곡고가	통행제한높이시설 파손	높이제한지설 정비	1개소	높이제한지설 정비	1개소
	56	화곡터널	화곡역 방향 터널내부 투명방음판 파손	투명방음판 보수(2mX2m)	1개소	투명방음판 보수(2mX2m)	1개소
	57	오목교	시설물 교명판 노후 및 탈색	시설물 교명판 교체	2개소	시설물 교명판 교체	2개소

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
2차	58	오금지하차도	옹벽 단면보수작업 차선부분통제	사인보드 사용	8hr	사인보드 사용	7hr
	59
	60		중앙분리대 안전 빗금도색으로 차선부분통제	사인보드 사용	16m	사인보드 사용	15hr
	61		박스 내부 신축이음부 누수에 의한 백태	사인보드 사용	8hr	사인보드 사용	4hr
3차	1	오목교(램프)	신축이음 하부 누수	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.07㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.07㎡
	2		누수로 인한 본선 받침부 강재 부식	슈청소공	1개소	슈청소공	1개소
	3		받침 몰탈 균열 및 탈락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.48㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.48㎡
	4		받침 및 앙카볼트 강재부식	슈청소공	1개소	슈청소공	1개소
	5		받침 Side Block와 거더접촉		1개소		1개소
	6		받침 앙카볼트 부식		1개소		1개소
	7		받침 몰탈 균열 및 들뜸	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.48㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.48㎡
	8		거더단부 및 받침볼트 부식	녹제거 후 조합페인트칠	1.73㎡	녹제거 후 조합페인트칠	1.73㎡
	9
	10		격벽 및 Web하부, 볼트부식		0.10㎡		0.10㎡
	11		Web, 보강재 하부 및 볼트부식	녹제거 후 조합페인트칠	0.10㎡	녹제거 후 조합페인트칠	0.10㎡
	12		브레이싱 용접부 도장누락	조합페인트칠	0.01㎡	조합페인트칠	0.01㎡
	13		브레이싱 용접부 도장누락		0.03㎡		0.03㎡
	14		브레이싱 용접부 도장누락		0.02㎡		0.02㎡
	15		브레이싱 용접부 도장누락		0.01㎡		0.01㎡
	16		브레이싱 용접부 도장누락		0.02㎡		0.02㎡
	17		상부 Splice부 볼트 녹발생	녹제거 후 조합페인트칠	0.02㎡	녹제거 후 조합페인트칠	0.02㎡
	18		하부 Splice부 볼트 녹발생		0.34㎡		0.34㎡
	19		브레이싱 용접부 도장누락	조합페인트칠	0.03㎡	조합페인트칠	0.03㎡
	20		브레이싱 용접부 도장누락		0.02㎡		0.02㎡
	21		브레이싱 용접부 도장누락		0.02㎡		0.02㎡
	22		상부 Splice부 볼트 녹발생	녹제거 후 조합페인트칠	0.05㎡	녹제거 후 조합페인트칠	0.05㎡
	23		하부 Splice부 볼트 녹발생		0.39㎡		0.39㎡
	24		하부 Splice부 볼트 녹발생		1.01㎡		1.01㎡
	25		격벽과 Web 용접누락(불량)	일일노무	1회	일일노무	1회
	26		신축이음 하부 후타재 탈락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.37㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.37㎡
	27		거더단부 콘크리트 잔재퇴적	일일노무	1회	일일노무	1회
	28		받침 베이스 플레이트 부식	슈청소공	1개소	슈청소공	1개소
	29		지점부 강박스 외부 부식	녹제거후 조합 페인트칠	2.50㎡	녹제거후 조합 페인트칠	2.50㎡
	30		하부플랜지 도막손상 2개소	녹제거후 조합 페인트칠	41.36㎡	녹제거후 조합 페인트칠	41.36㎡
	31		강박스 볼트도장 박리		3.03㎡		3.03㎡

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
4차	1	목동교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	2	안양교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	3	개봉철도고가	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	4	화곡고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	5	신월IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	6	오류IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	7	시흥IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	8	작동터널	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	9	국회앞지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	13개소	집수정유입구명판교체	13개소
	10	등촌지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	11	목동교서측지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	12	선유도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	13	노들길지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	6개소	집수정유입구명판교체	6개소
	14	여의하류2교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	15	서울교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	16	고척교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	17	광명교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	18	개봉교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	19	행주1교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	20	행주2교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	21	개화교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	22	개봉고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	23	궁동터널	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	24	생태터널	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	25	오목교서측지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	26	개화천복개구조물	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	27	개봉지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	5개소	집수정유입구명판교체	2개소
	28	오목교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	29	오금교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	30	여의2교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	31	광복교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	32	구로도림교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	33	가리봉철도고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	34	개화IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	35	공단IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	36	구로역지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	4개소
	37	도림천복개(좌안)	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	38	도림천하류복개	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	39	신도림지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	40	오목교동측지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	41	구로1교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	42	구로고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	43	가마산고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	44	오류철도고가차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
4차	45	영등포R IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	46	화곡터널	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	47	가마산지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	4개소	집수정유입구명판교체	9개소
	48	공항입구지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	49	개화지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	50	외발산지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	4개소	집수정유입구명판교체	4개소
	51	고척2지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	4개소	집수정유입구명판교체	2개소
	52	서부트럭터미널앞 지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	4개소
	53	여의2지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	4개소	집수정유입구명판교체	4개소
	54	여의하류지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	55	범박터널	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	56	역곡천교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	57	오금지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	58	오목지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	59	염창IC하부복개도로	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	60	서울교접속지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	61	성산지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	62	신정교접속교	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
	63	구로지하차도	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
			터널내부	집수정유입구명판교체	2개소	집수정유입구명판교체	2개소
	64	행주IC	상,하행	도로시설물명판교체	2개소	도로시설물명판교체	2개소
5차	1	개화지하차도	측구배수로	그레이팅설치	646m	그레이팅설치	646m	야간
				교통정리원	14일	교통정리원	14일	〃
				포장절단	646m	포장절단	646m	〃
				사인보드	112hr	사인보드	112hr	〃
	2	공항입구지하차도	측구배수로	그레이팅설치	622m	그레이팅설치	622m	〃
				교통정리원	14일	교통정리원	14일	〃
				포장절단	622m	포장절단	622m	〃
				사인보드	112hr	사인보드	112hr	〃
	3	목동교서측지하차도	측구배수로	그레이팅설치	108m	그레이팅설치	108m	〃
				교통정리원	2일	교통정리원	1일	〃
				포장절단	108m	포장절단	108m	〃
				사인보드	16hr	사인보드	8hr	〃
	4	구로역지하차도	측구배수로	그레이팅설치	495m	그레이팅설치	495m	〃
				교통정리원	11일	교통정리원	11일	〃
				포장절단	495m	포장절단	495m	〃
				사인보드	88hr	사인보드	88hr	〃
	5	여의하류지하차도	측구배수로	그레이팅설치	122m	그레이팅설치	122m	〃
				교통정리원	4일	교통정리원	4일	〃
				포장절단	122m	포장절단	122m	〃
				사인보드	32hr	사인보드	32hr	〃
	6	국회앞지하차도	측구배수로	그레이팅설치	1,054m	그레이팅설치	1,054m	〃
				교통정리원	22일	교통정리원	22일	〃
				포장절단	1,054m	포장절단	1,054m	〃
				사인보드	176hr	사인보드	176hr	〃

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
6차	1	행주2교	교량난간 추돌에 의한 손상	난간 파이프 재설치	6m	난간 파이프 재설치	6m
	2			난간지주 교체	1본	난간지주 교체	1본
	3	개봉고가	텐던 피복 부분파손	일일노무	1회	일일노무	1회
	4		교명주 이탈	일일노무	1회	일일노무	1회
	5		P4 교각 철근노출 및 콘크리트 박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.21㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.21㎡
	6			콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.96㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.96㎡
	7	오목교서측 지하차도	옹벽부 타일 탈락 및 콘크리트 박리 박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.15㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.15㎡
	8		상부 화강석 파손 및 콘크리트 박리박락	화강석교체(일일노무)	1회	화강석교체(일일노무)	1회
	9			콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.74㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.74㎡
	10		상부 인도부 콘크리트 파손	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.16㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.16㎡
	11		중앙하부 화강석 이격	일일노무	1회	일일노무	1회
	12		슬래브하부 박락	표면보수	12.9㎡	표면보수	12.9㎡
	13			물끊기공 설치(AL)	9.7m	물끊기공 설치(AL)	15.5m
	14	개화천 복개	상부 충격흡수시설 차량 잔재물 걸림	일일노무	1회	일일노무	1회
7차	1	영등포로터리	교량하부 PC강선 정착단 녹발생	철재면 녹제거	3.72㎡	철재면 녹제거	3.72㎡
	2			조합페인트칠	17.96㎡	조합페인트칠	17.96㎡
	3			트럭탑재형 크레인	8hr	트럭탑재형 크레인	8hr
	4			일일노무	2회	일일노무	2회
	5			사인보드	8hr	사인보드	8hr
	6			교통정리원	1일	교통정리원	1일
	7	안양교	교량하부 PC강선 정착단 녹발생	철재면 녹제거	4.79㎡	철재면 녹제거	4.79㎡
	8			조합페인트칠	4.79㎡	조합페인트칠	4.79㎡
	9			트럭탑재형 크레인	16hr	트럭탑재형 크레인	16hr
	10			일일노무	2회	일일노무	2회
	11			사인보드	16hr	사인보드	16hr
	12			교통정리원	2일	교통정리원	2일
	13	개봉고가차도	교량하부 PC강선 정착단 녹발생	철재면 녹제거	42.5㎡	철재면 녹제거	42.5㎡
	14			조합페인트칠	42.2㎡	조합페인트칠	42.2㎡
	15			트럭탑재형 크레인	32hr	트럭탑재형 크레인	32hr
	16			일일노무	16회	일일노무	16회
	17			사인보드	16hr	사인보드	16hr
	18			교통정리원	4일	교통정리원	4일
8차	1	화곡터널	터널내 보행로 벽체 낙서로 미관저해	조합페인트칠	1,770.2㎡	조합페인트칠	1,770.2㎡
	2		도로명 주소명판 위치변경	일일노무	1회	일일노무	1회
	3		갱구부 주변 누수에 의한 열화	콘크리트 표면보수	17.0㎡	콘크리트 표면보수	17.0㎡
	4			물끊기공 설치	15.0m	물끊기공 설치	15.0m
	5	개화지하차도	슬래브하면 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.30㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.30㎡
	6	외발산지하차도	도로상부 녹지대 유턴구간 차량추락 사고로 안전시설필요	SOLAR점멸기 (경보등) 설치	1개소	SOLAR점멸기 (경보등) 설치	1개소
	7			콘크리트 타설	0.25㎡	콘크리트 타설	0.25㎡
	8	구로고가차도	거더(S4)콘크리트 탈락 및 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.60㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.60㎡
	9			콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.75㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.75㎡

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
8차	10	여의2지하차도	옹벽구간 신축이음 주변 타일탈락	타일보수	0.91㎡	타일보수	0.91㎡
	11		연석부 철근노출	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.93㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.93㎡
	12		콘크리트 박리박락	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.54㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.54㎡
	13	구로1교	가로등 기초주변 도로상태 불량	일일노무	2회	일일노무	2회
	14	공항입구 지하차도	교통사망사고 예방위한 교통안전시설물 설치 요청	델리네이터 설치	70개소	델리네이터 설치	70개소
	15	광명교	가드레일 파손	가드레일판 교체	1개소	가드레일판 교체	1개소
	16	여의하류2교	교명주 받침 콘크리트 파손 및 기울어짐	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.78㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	0.78㎡
	17			일일노무	2회	일일노무	2회
	18	가리봉철도고가	콘크리트 박리박락	콘크리트단면보수 (T=30mm)	0.68㎡	콘크리트단면보수 (T=30mm)	0.68㎡
	19			물끊기공 설치	1.7m	물끊기공 설치	1.7m

다. 개략공사비 : 698,793천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 이상없이 작업완료한 바, 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.