함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(휘경C증압장 구조물 및 상수도관 부설공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 「휘경C증압장 구조물 및 상수도관 부설공사」에 대하여 준공기한 연기사유가 발생되어 아래와 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 휘경C증압장 구조물 및 상수도관 부설공사

나. 계 약 자 : 칠갑공영(주)  대표 이정현

다. 계약금액 : 금61,944,090원

라. 준공기한

- 당 초 : 2016.08.08.~2016.09.06.

- 변 경 : 2016.08.08.~2016.09.30.

마. 귀책사유 : 동부수도사업소(지체상금 미부과)

바. 연기사유 : 절대공기 부족으로 준공기한 연기

첨부 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박상열		시설관리팀장	代유광창		시설관리과장	09/06 최명익
협조자
시행	시설관리과-24964	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(5)