문서번호	도로보수과-8777
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		09/06 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 중앙버스전용차로 흐름

개선사업 작업완료 보고

2016.  09. 6(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 중앙버스전용차로 흐름

개선사업 작업완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 중앙버스전용차로 흐름 개선사업

○ 위    치 : 서대문구 통일로 영천시장~서대문사거리 간

○ 개선내용 : 무단횡단금지시설 설치, 노면표시 개선

○ 예산배정 : 96,849천원

□ 작업완료내역

○ 건   명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제13차)

- 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

- 작업기간 : 2016. 07. 22. ~ 2016. 08. 30.

- 공사금액 : 41,255천원(관급포함)

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
백색차선 도색	533m	75m	감) 458m	실 작업량 변동
황색차선 도색	1,246m	1,208m	감) 38m
청색차선 도색	237m	108m	감) 129m
문자․기호 도색	0m	320m	증) 320m
백색차선 재도색	1,504m	2,449m	증) 945m
황색차선 재도색	3,828m	1,996m	감) 1,832m
청색차선 재도색	568m	508m	감) 60m
문자․기호 재도색	932m	1,919m	증) 987m
횡단보도 재도색	1,413m	1,410m	감) 3m
노면표시 제거	2,035m	1,711m	감) 324m
도로표지병 철거	59개	59개	-
합 계	12,355m	11,763m	감) 592

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치(현장설치도)

- 시 공 사 : 다해산업개발(주) 대표 김영현

- 작업기간 : 2016. 07. 22. ~ 2016. 09. 10.

- 공사금액 : 36,828천원(관급포함)

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
무단횡단금지 시설 설치	244경간	222경간	감) 22경간	작업물량 감소

○ 공사금액

공 사 명	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시(관급포함)	41,727천원	41,255천원	감) 472천원
차선분리대(관급)	40,477천원	36,828천원	감) 3,649천원

○ 현장사진

공사전
공사후

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실 작업완료분에 대하여 기성준공 처리.

○ 2016년 중앙버스전용차로 흐름개선사업 작업완료 통보(교통운영과)

○ 사업 잔여예산 18,766천원은 교통운영과와 협의하여 신촌역 외 6개소 중앙버스정류장 보도정비 등 보수예산으로 활용.

붙 임 : 1. 노면표시 유지보수공사 제13차 작업완료 내역서 1부.

2. 교통개선사업 작업완료 사진대지 1부.

3. 교통개선사업  작업완료 도면 2부.  끝.