문서번호	급수운영과-3647
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		02/21 장시명
협조

시설물보수공사 작업기한 연기보고

2014. 02

남부수도사업소

(급수운영과)

2013년 관악,금천구 관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사와 관련하여 아래와 같이 작업기한 연기 사유가 발생하여 보고 드립니다.

2014. 02.

보고자  직 : 지방시설주사  강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제목 : 시설물보수 및 설치공사 준공기한 연기보고

□ 관련근거 : 상수도공사관리처-1798(2014. 02. 21)호

□ 현장내용

○ 작업지시번호 : 상수도시설물(금천) - 81번

○ 위       치 : 시흥동 869-28번지외 13개소

○ 작 업 내 용 : 노후밸브교체 및 변실정비

○ 계 약 업 체 : 크로스텍엔지니어링  대표 : 조광치

□ 보고내용

○ 상기 작업지시에 의하여 시설물(노후밸브)보수공사중 동절기(한파)로 인하여 굴착공사 작업이 어려워 시설물보수공사 작업기간내에 공사가 불가하여, 부득이 준공 기한 연기가 불가피한 실정임

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 처리의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 준공기한을 연기하여 시설물보수공사 업무에 만전을 기하고 위 사항을 시설관리공단에 통보하고자 합니다.

- 당초 작업기간 : 2014.01.16. ~ 2014.02.25.

- 변경 작업기간 : 2014.01.16  ~ 2014.03.14.  끝.