문서번호	도로보수과-4317
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
김용면		이상호	09/07 이종엽
협 조

『행당도시개발사업 공공시설물(시도)』

포장도로 및 부속시설물 인수인계 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  9.   .

『행당도시개발사업 공공시설물(시도)』

포장도로 및 부속시설물 인수인계 검토 보고

한국토지주택공사에서 시행한‘행당도시개발사업 조상사업’구간(한양대병원사거리~행당중학교)포장도로 및 부속시설인수인계 요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		시설물현황

○ 시 설 명 : 행당구역 도시개발사업 조성공사

○ 사업장 위치 : 서울특별시 성동구 행당동, 응봉동 일원

○ 공사구간(시도) : 행당 도시개발사업구역 내(중로1-448)

○ 공사기간 : 2009. 2. 6 ~ 2015. 5.31

○ 규    모 : 도로폭 20m, 연장 600m

○ 계획평면도

Ⅱ		인수인계 시설현황

○ 도로포장

- 아스콘포장 : B = 13~15m, 78.9@

‧ 표층(#67) T=5cm / 중층(#467) T=6cm / 기층(#467) T=10cm

보조기층 t=25cm / 동상방지층 t=24cm

- 미끄럼방지 포장 23.7@

○ 교통시설물(기 인수완료) : 교통표지판 및 차선도색 1식

○ 사고석포장 : 151㎡

○ 기타 부속시설

Ⅲ		인수인계 경위

○ ‘09. 2. ~ ’15. 5 : 착공 및 준공

○ ‘15.11.11 : 시설물 합동점검

- 점검자 : 시설7급 김용면외 4명

- 지적사항 : 맨홀침하 및 도로균열 등 15건(첨부 참조)

○ ‘16. 1.18 : 합동점검 지적사항 보수 조치완료

○ ‘16. 1.29 : 인수요청(한국토지주택공사 서울단지사업2부-207호)

Ⅳ		점검 및 인수검토 결과

연번	시설물	규 모	합동점검 결과	인수검토의견
1	아스팔트포장	폭13~15m,연장600m 78.9@	이상없음	인수
2	미끄럼방지	23.78@	이상없음	인수
3	맨홀	15개소	이상없음	인수
4	경계석 및 측구, 빗물받이	아스팔트포장 가로변	1. 이상없음 2. 인수시설 제외	인수 제외 (자치구 관리)

Ⅴ		행정사항

○ 인수인계서 및 하자보수보증서 제출(한국토지주택공사→성동도로사업소)

○ 도로시설물(차도 및 부속시설물) 포장관리시스템 등록 및 관리카드 작성

붙임 : 1. 현장점검 및 조치결과 사진 1부.

2. 시설물 인수인계서 1부.

3. 하자보수보증서 1부. 끝.