문서번호	급수운영과-20956
결재일자	2016.9.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
정헌석	이경희	최철민		09/07 代김용근
협 조	★행정지원과장		代김형국
	시설관리과장		代고신석

공정보고회(9월) 개최결과 보고

2016. 9. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공정보고회(9월) 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행 중인 배급수(송배수)관정비공사에 대한 9월 공정보고회 개최결과를 보고 드림.

1		보고회 개요

□ 일 시 : 2016. 9. 5.(월) 16:00

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

□ 대상사업

○ 독산로~시흥대로간 송배수관정비공사 외 5건

□ 참석자(23명)

○ 사 업 소(14) : 행정지원과장, 급수운영과장, 시설관리과장
(※ 사업별 공사 업무담당자 배석)

○ 시설공단(3) : 공사감독 고기영 외 2명

○ 현장관계자(6) : 홍익산업개발 현장대리인 임선규 외 5명

□ 회의안건 :

○ 사업 추진실적 보고 및 부진사항에 대한 대책 마련

○ 철저한 공사장 안전관리 구축

○ 상호 신뢰구축을 통한 청렴문화 정착 조성 등

2		공정현황

(’16. 8. 31. 기준)

연번	공 사 명	공사개요		공사기간	사업비 (백만원)	추진현황	공정율
		구경 (mm)	연장 (m)
계		400~ 800	10,976		10,622	4,543m	41%
4	독산로~시흥대로간 송배수관정비공사(APC)	600	400	2016.7.25.~12.21.	800	횡단굴착 8개소	5%
3	여의도동 5-2구간외 1개소 송배수관정비공사(개착)	400	400	2016.5.16.~11.28.	700	299m	63%
5	독산동 378-242번지외 6개소 배급수관 정비공사	80 ~300	2,560	2016.5.4.~12.27.	1,722	1,082m	77%
6	행운동63-19~63-43번지외 9개소 배급수관 정비공사	100 ~200	2,120	2016.4.29.~12.16.	1,500	713m	79%
7	신대방동685-3～644-1번지외 5개소 배급수관 정비공사	100 ~300	2,375	2016.5.10.~12.24	3,200	917m	40%
8	여의도동24-3～26-4번지외 7개소 배급수관 정비공사	200 ~300	3,121	2016.5.11.~12.23.	2,700	1,532m	60%

3		주요 보고사항

□

주요 공정 추진

○ 추진실적이 저조한 독산로 송배수관정비공사는 별도 공사 추진계획

수립 보고(현 진행사항 및 향후 공정계획)

○ 기존관 철거 실적 저조에 따른 향후 적극적인 관리 대책 추진

- 철거율 74%이상 추진 목표 시행

○ 단수시 철저한 홍보와 단수시간을 준수하여 시민불편이 없도록 조치

□

공사장 안전관리

○ 공사현장 보행자 통행로 확보 및 안전시설 확보 철저

○ 각종 장비 사용 등으로 인한 작업자 안전사고 예방 철저

○ 되메우기 불량으로 인한 도로 침하(동공) 발생이 없도록 시공관리 철저

□

청렴도 향상

○ 다양한 소통채널 확보로 현장 불만 해결 및 상호 청렴성 제고

○ 발주자 우위가 아닌 대등한 계약관계로 상호 존중

□

기타(건의사항 등)

○ 추석전 노무비, 장비대금 등이 미지급 되는 사례가 없도록 철저 감독

○ 내실 있는 보고회가 될 수 다음차 공정보고회 자료는 문제점 및 개선

대책, 향후 추진계획 위주로 상세히 준비

○ 기타 애로사항 및 건의사항 없음

4		향후계획

□ 9월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 시설관리공단에 통보하여 보완토록 조치

□ 10월 공정보고회 개최

○ 2016.10.10.(월) / 사업소 2층 회의실

붙임 : 9월 공정보고 회의자료 1부.  끝.