문서번호	토목과-10099
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제329호

주무관		도로관리팀장		토목과장	안전건설교통국장		부구청장		구청장
최우람		백원기		박주완	김재겸		이비오		09/07 정원오
협조	기획예산과장		이윤영
	안전관리과장		장완수
	예산팀장		이정희
	도시안전팀장		김용중

★ ◉

용산구 경계 옹벽 개선사업 추진 계획

2016. 9.

	성 동 구
	(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( 옥수동 일대 주민 ) 무 □
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 ☑
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

용산구 경계 옹벽 개선사업 추진 계획

탈색 등으로 미관을 저해하고 있는 용산구 경계 옹벽을 개선하여 성동구 이미지 제고와 깨끗한 도로환경 조성

Ⅰ		현 황

❍ 용산구와의 경계에 위치한 해당 옹벽은 성동구의 관문 역할 수행

❍ 옹벽 벽화가 노후·탈색되어 도로 미관 및 우리 구 이미지를 저해하고 있음

벽화 노후, 탈색	도로 미관 저해

Ⅱ		문제점 및 대책

❍ 문제점: 설계용역 및 공사 소요예산 미확보

❍ 대  책: 안전관리과 구복지비 및 특별교부금 사용

- 설계비 (18백만원): 안전관리과 구복지비 예산으로 용역 실시

- 공사비(250백만원): 하반기 시 특별교부금 확보 공사 추진

Ⅲ		사업계획

❍ 위    치: 옥수동 460-20 일원(독서당로, 용산구 경계)

❍ 규    모: 옹벽 3개소, 연면적 1,300㎡

❍ 사업내용: 옹벽 디자인 개선, 경관조명 및 조형물 설치 등

❍ 사업기간: 2016. 9. ~ 2017. 5.

❍ 소요예산: 268백만 원(설계비 18 / 공사비 250)

Ⅳ		추진일정

❍ 2016. 9. ~ 11.      : 실시설계 용역

❍ 2016. 11.          : 디자인 자문, 심의

❍ 2016. 12. ~ 2017. 5. : 공사 시행

Ⅴ		행정사항

❍ 설계용역비 구복지비 사용 협조(기획예산과, 안전관리과)

❍ 공사비 하반기 특별교부금 확보 추진(기획예산과)

붙 임   위치도 및 현황사진  1부.