문서번호	계획설계과-7986
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
김형식		이임섭	09/07 이규상
협 조

“수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역” 관련

업무협의 출장 결과 복명

2016. 9.

상수도사업본부

[급 수 부]

“수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역” 관련

업무협의 출장 결과 복명

‘수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역’과 관련한 업무협의를 위하여 국립공원관리공단 북한산사무소에 출장하여 그 결과를 복명함.

Ⅰ		용역개요

용 역 명	수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	강북구 수유동 산84-5 일대
시설규모	배수지 용량 : 3,000㎥ 송배수관 부설 : 구경 400~500㎜, 연장 1.07㎞
용역목적	강북구 수유1동 외 6개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간(6.1hr→12.1hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물을 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축
용역기간	2016.4.4. ~ 2016.12.29.
용 역 비	186,560천원
용 역 사	㈜ 천일

Ⅱ		북한산국립공원 업무협의 추진 경위

▢ ’16.7.29. : 1차 방문, 사업설명

(용역사 직원 2명 출장, 북한산사무소 직원 박양규 면담)

○ 협의 문서가 접수되면 검토 하겠으나, 수림훼손에 따른 복구 계획이 없으면 사업은 ‘불가’하다는 답변

▢ ’16.8.11. : 설계용역 추진 관련 협조 공문 발송(계획설계과-7255)

○ 수유6배수지 건설공사 사업부지(수유동 산84-5)는 국립공원구역이며 자연환경보전지구로 생태계 건강성 등 훼손 우려로 사업시행이 ‘불가’함 회신[북한산사무소-5052(’16.8.20.)]

▢ ’16. 8.26. : 2차 방문

(계획설계과 담당 김형식 등 3명 출장, 북한산사무소 직원 박양규 면담)

○ 사업의 목적 및 필요성, 수림 이식 및 재조성 방안 설명

- 남산배수지 상부 수림 조성 등 사례 제시

○ 북한산 사무소 내부 재검토 후 연락하겠다는 답변

○ 내부 검토한 바 기존 수림의 훼손에 대한 우려가 크고, 원상회복이 어렵다는 판단으로 ‘사업시행 불가’ 하다는 유선 통보(’16.8.31.)

▢ ’16. 9. 6. : 3차 방문(금회 출장)

Ⅲ		출장개요 및 결과

▢ 출장 개요

○ 일시 : 2016년 9월 6일 11:00

○ 장소 : 국립공원관리공단 북한산사무소(성북구 정릉동 소재)

○ 출장자 : 계획설계과장 이임섭, 업무 담당 김형식(용역사 직원 2명 동행)

▢ 출장 결과(북한산사무소 자원보전과장 이경식 등 2명 면담)

《상수도사업본부》

○ ‘수유6배수지 건설공사’의 목적 및 국립공원 내 부지 선정의 불가피성 설명

○ 수유6배수지 상부 수림조성 계획 제시(조경계획 도면 지참)

《북한산사무소》

○ 생태복원계획이 포함된 기본설계 후 협의 바람.

- 수림 훼손을 최소화한 시설규모의 축소 요구

- 수림 훼손 예상범위를 현장에 표식하면, 확인 후 검토 예정

○ 가급적 협의 일정 늦추어 진행 바람.(’17.1. 이후)

Ⅵ		향후계획

▢ 북한산사무소 측 의견 검토 및 수림 조성계획 작성, 협의 추진.

(’16. 9. 중)

붙임 : 출장협의 관련도면 1부.  끝.