함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰(마천동외14개동 상수도공사) 1차

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 마천동외14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : ***************

다. 공사기간 : 2016.06.21.~2017.06.30

라. 변경사유 : 신규공종 및 계약물량 증감사항 발생

마. 변경내역

(단위:원)

구 분	금 액		비 고
	당 초	변 경
총계약금액	***********	***********	계약금액 및 차수별 금액변경 없음
1차금액	***********	***********	차수별 금액변경 없음
2차금액	***********	***********

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의서 각 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	代김종수		급수운영과장	09/07 전명수
협조자
시행	급수운영과-17227	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	부분공개(7)