문서번호	한양도성도감-1537
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김종범		문인식	02/21 권기홍
협조

용역 계약기간 변경계획

(한양도성 안내표지판)

2014. 2.

한양도성도감

- 한양도성 안내표지판 디자인기획 및 시범설치 실시설계   -

용역 계약기간 변경계획

□ 용역 개요

○ 용 역 명

- 한양도성 안내표지판 디자인기획 및 기본설계 용역

- 한양도성 안내표지판 문안작성 및 시범설치 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’13. 8. 8 ~ ’14. 2. 28

○ 계약업체 및 용역내용

계약업체	용역내용	계약금액
(주)에스이공간환경디자인그룹 (대표 이현성)	디자인기획 및 기본설계	17,100천원
(주) 에스피애드(대표 장세도)	시범설치 실시설계 용역	11,000천원

□ 그간 추진경위

○ ’13. 8.  8. 계약체결 및 착수

○ ’13. 8. 29. 시민단체, 문화재보호재단 등 관계부서 의견수렴 (1차)

○ ’13. 9. 13. 관계부서 의견수렴 (2차)

○ ’13. 9. 25. 한양도성자문위원회 전문가자문(1차)

○ ’13.11. 13. 한양도성자문위원회 전문가자문(2차)

○ ’13.11. 20. 서울시민디자인위원회 심의

○ ’13.12. 20. 서울시민디자인위원회 보고(조건부동의사항)

○ `14.01. 03. 시장보고

□ 계약기간 연장 사유

○ 시장보고 결과 ‘길표지판ㆍ색상 등 디자인 추가개선이 필요하며, 문화재 보존·관리 및 문화재 안내판에 대한 경험과 전문성이 있는 민간 재단 등과 협업 방안 모색’ 요청지시에 따라 과업기간 추가연장 필요

□ 변경 내용 : 계약기간 연장 (3차)

○ 용역계약기간 연장

변경전	변경후
’13.8.8 ~ ’14.2.28	’13.8.8 ~ ’14.8.29

※ 계약금액 변동 없음

□ 행정 사항

○ 용역 계약업체와 계약기간 연장 합의 (계약금액 변동없음)

- (주)에스이공간환경디자인그룹 (대표 이현성)

- (주) 에스피애드(대표 장세도)

○ 용역 계약기간 연장요청 통보 (재무과)

붙임 : 한양도성 현안사항 시장보고 결과 1부.  끝.