보고서(거여2-2지구 대체상수도관 신설 변경)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	김용현	09/08 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-17285

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

보고요지 : 거여2-2구역 대체 상수도관 신설 변경

위    치 : 송파구 거여동 거여2-2구역

관련문서 : 급수운영과-13944(거여2-2구역 주택재개발 부지내 상수도인입관폐쇄 협조요청에 따른 회신)

거여2지구 제2016-126(거여2지구 주택재개발정비사업내 대체급수배관 신설 변경요청)

보고내용

당초 거여2-2구역 사업부지내에 매설되어 있는 상수도관을 통해서 거여2-1구역 및 거여동 136번지 일대에 급수공급이 되고 있으므로 사업부지내 상수도관 철거전에 ①거여동 34-10~35-5구간(D=200mm, L=250m), 도로개설구간인 ②남북연결도로 거여동 36~214-2구간(D=200mm,L=390m), ③마천로 거여동 214-5~591구간(D=300mm,L=240m)에 대체 상수도관을 매설하도록 협의 하였으나,

주택재개발 조합측에서 ①, ② 구간만 대체 상수도관을 매설해도 거여2-1구역 및 거여동 136번지 일대 주민급수에는 지장이 없을 것 같다는 의견이 접수되어 검토한 바,

③구간은 향후 거마가압장~사자아파트앞 노후송배수관(D=400mm) 정비대상구간으로 송배수관 개량후 이 배관으로 대체가 가능함.

보고자의견

위와 같이 검토되어 거여2-2구역 주택재개발 정비사업조합에 ①, ②구간만 대체상수도관을 매설하도록 통보하고, 이에 따른 원인자 부담금고지서(측량비, 고재처리비등)를 재발부 하고자 합니다.

붙임  원인자부담금 산출근거 1부.  끝.