함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(제1회) 계약의뢰(2016년 광진구관내상수도공사)

우리 사업소에서 시행중인 『 2016년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 』 에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고 계약의뢰 하오니 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : ****************

다. 공사기간 : 2016.5.27~2016.12.30.(총부기기한:2016.5.27.~2017.6.30)

라. 설계 변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증․감

마. 설계변경 금액 내역 : 금액 변경 없음

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 · 감(원)	비 고
도 급 비	647,750,000	647,750,000	-

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사+업비용, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(불용관정비)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 상하수도관교체비(교체장애수전정비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보호통 보온재등 정비)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후상수도관(송배수관)정비]

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(음수대설치사업)

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설 설치

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설 보수

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의뢰서 및 사전심의 의결서 각1부.

	동부수도사업소장
주무관	최덕환		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	09/08 代배성호
협조자
시행	급수운영과-22658	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2870	/전송	02-3146-2789	/	cowboy8817@seoul.go.kr	/	부분공개(6)