함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	삼성가압장(봉은배수지) 안전진단 관련 추진계획 송부 및 협조요청

1. 강남수도사업소 시설관리과-20703호(2016.9.1.)와 관련입니다.

2. 삼성가압장(봉은배수지) 특고압 전기설비 안전진단 급수운영 대책에 대하여 9.8.(목) 개최된 관계자회의에서 협의한 결과에 따라 아래와 같이 급수운영 및 안전진단을 시행코자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 삼성가압장 특고압 전기설비 안전진단 급수운영 추진계획

- 일  시 : 2016. 9.21.(수) 23:00 ~ 익일 03:00(작업 완료시까지)

- 참여부서 ┏ 본부 배수과, 시설관리과

┗ 구의, 암사정수센터, 강남수도사업소 담당 및 팀장, 직반장 등

- 추진내용 : 삼성가압장(봉은배수지) 전기설비 안전진단을 위해 사전 관련배수지 만수위 확보, 암사(고양정) 직송수계로 수계전환, 안전진단 후 환원조치 등 안정적인 급수운영 시행

▶ 총 작업시간 : 약 4시간(사전준비 1.5시간, 작업시행 2.5시간)

◈ 부서별 협조사항

- 관련배수지 만수위 확보 : 2016. 9.22.(목) 01:00까지

▶ 강남수도사업소(삼성, 봉은, 반포, 방배), 구의정수센터(아차산)

․삼성 4.5m, 봉은 5.2m 까지 수위 확보

․아차산배수지는 만수위 확보 후 안전진단 중에는 암사 공급량 최소화

▶ 각 사업소 및 정수센터 제어실은 해당 시간까지 배수지 만수위 확보토록 급수운영 철저

- 안전진단 중 관련부서별 비상근무(자체편성) 시행

▶ 대상 : 본부 배수과, 시설관리과, 강남수도사업소

- 암사정수센터

▶ 삼성,봉은배수지 제어실과 긴밀한 연락체계 유지하여 암사(고양정) 송수펌프 가동에 만전을 기할 것

- 강남수도사업소

▶ 안전진단 총괄 주관 및 밸브조절 등 급수운영 시행

▶ 진단기간중 삼성가압장 공급수계내 이상유무(공급압력, 공급량, 수질변동 등) 상시 모니터링 시행

※ 기타 세부 작업 추진내용은 붙임문서 참조

따로붙임 : 삼성가압장 안전진단 관련 세부 추진계획서(강남수도사업소) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장,강남수도사업소장,구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	09/09 이규상
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-7950	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개