문서번호	시설개선과-9817
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		09/09 최용덕
협 조

설계변경 검토 보고

(잠실주경기장 보일러 배관 교체공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

시설개선과

설계변경 검토 보고

(잠실주경기장 보일러 배관 교체공사)

「잠실주경기장 보일러 배관 교체공사」 시행 중 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 검토 후 보고함

□ 공사개요

○ 공사명 : 잠실주경기장 보일러 배관 교체공사

○ 공사기간 : 2016.08.08. ~09.16.

○ 시공자 : 교보정보통신(주)오교철

○ 공사비 : *************

○ 주요공사내용 : 기존보일러 10톤×1대 철거, 신설 관류형 보일러 5대 주변 배관 및 펌프, 응축수탱크, 연도공사

□ 추진경위

○ 2016.07.29. 공사계약

○ 2016.08.08. 공사착공

○ 2016.09.16. 공사준공

□ 변경내용

공 종 별	당 초	변 경	변 경 사 유	비고
1. 장비설치공사	보급수펌프 3.0kw ×5대	보급수펌프 3.0kw×5대 배관공사 시공사 내역 에서 삭제	보급수펌프 3.0kw×5대 보일 러 제작사 납품 내역과 중복	변경내역참조
2. 기계실배관공사	-	- 자동경수장치,약주탱크 패드 설치 - 보급수펌프 패드 에폭 시 마감	내역 누락	“
3. 가스배관공사	-	도시가스 인허가비	내역누락	“

□ 검토내용

○ 보급수펌프는 보일러납품회사 내역과 배관공사 시공회사 내역이 중복됨으로써 배관공사 시공분에서 감액

○ 도시가스인허가비와 패드설치 및 에폭시마감은 필요한 부분으로 내역에서 누락됨으로써 증액

□ 공사비 변경내역

단위(원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총 공 사 비	***********	***********	************
도 급 비	***********	***********	***********
도시가스인허가비	*	*********	***********

□ 조치계획

○ 위와 같이 공사내용을 변경하고 설계변경 처리하고자 함

첨부 : 설계변경 내역서 및 변경도면 1부.  끝.