문서번호	설비부-14208
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양성구		김창균	09/09 권오식
협조

『도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2016. 9.

도시기반시설본부

(설비부)

「도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사」

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

「도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사」관련, 도급공사분 공기연장에 따른 관급자재 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

공사개요

□ 공 사 명 : 도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사

□ 위    치 : 마포구 공덕동 370-4(구 한국산업인력공단 별관동)

□ 공사규모 : 지하2층, 지상10층(연면적 10,835.20㎡)

□ 공사기간 : `15.12.28. ~`16.11.21.

□ 공 사 비 : 4,290백만원(도급 2,761, 관급 1,529)

□ 시 공 사 : ㈜영풍디엔씨

□ 감 리 단 : ㈜펨코엔지니어링 외 1개사

관련근거

□ 건설사업관리단 실정보고(관급자재 납품기한 연기 검토보고)

- PC도기 16-166호(`16.09.08.)

검토보고 내용

□ 관급자재 납품기한 연기

건 명	계약업체	계약금액 (변경없음)	납품기한		비 고
			당 초	변 경
승강기	㈜한양엘리베이터	192,564,000원	`16.09.30.	`16.11.21.
전기히트펌프	삼성전자㈜	18,026,400원	`16.09.30.	`16.11.21.
공기순환기	삼성전자㈜	34,571,880원	`16.09.30.	`16.11.21.
고무발포단열재	㈜하이코리아	66,960,580원	`16.09.19.	`16.10.31.

□ 연기사유 : 선행공사 공기연장(2016.10.27. ⇒ 2016.11.21)에 따른 관급자재 납품시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 건설사업관리기술자 검토의견

- 선행공사 공기연장에 따른 관급자재 납품기한 연장은 적정함

조치의견

□ 건설사업관리기술자의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게 관급자재 납품기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.