투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(4공구) 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	2016년 9월 휴일 근무계획 승인 통보

1. 도화(우이경감) 제2016-345호(2016.09.07)와 관련입니다.

2. 「우이-신설 경전철 민간투자사업 건설공사(4공구)｣와 관련 2016년 9월 휴일 근무를 다음과 같은 조건으로 승인하오니 공사 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일 근무자 및 작업현황

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		비 고
9. 10(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 연결통로 철근조립 및 거푸집 설치	*** *******
		L12정거장 (보문역)	비상탈출통로 철근조립 및 거푸집 설치
		L12E환기구 (동대문세무서별관)	가로등주 설치 및 보도복구
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 1단 띠장 및 버팀보 설치
9. 11(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 연결통로 철근조립 및 거푸집 설치	*** *******
		L12정거장 (보문역)	비상탈출통로 철근조립 및 거푸집 설치
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 토공
9. 24(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 연결통로 가시설해체 및 방수	*** *******
		L11E환기구 (경동고사거리)	보도 복구
		L12정거장 (보문역)	2단계 되메우기 및 경계석 설치
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 토류벽 거푸집 설치
9. 25(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 연결통로 철근조립 및 거푸집 설치	*** *******
		L12정거장 (보문역)	2단계 되메우기 및 경계석 설치
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 토공

나. 휴일 근무 승인조건

∘ 휴일작업에 감리비는 시공사 부담(책임감리 입찰안내서 제6장 6.2 원인자 부담)

∘ 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

∘ 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

∘ 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

다. 업무지시

∘ 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

∘ 감리자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

∘ 휴일 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

∘ 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

∘ 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

∘ 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

∘ 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정영호		공정관리과장	김형건		도시철도사업부장	09/09 代김형건
협조자	주무관	박형복
시행	도시철도사업부-8487	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7180	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(6)