문서번호	문화체육과-20850
결재일자	2016.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제338호

★생활체육팀장		문화체육과장		행정관리국장		부구청장		구청장
고옥래		이현식		박기웅		이비오		09/09 정원오
협조	재무과장		김성철
	치수과장		박상준
	계약팀장		김종수
	하천관리팀장		박동규		안전건설교통국장		김재겸

★ ◉

- 응봉교 하부 체육공원 -

리틀야구연습장·족구장 조성 계획

2016. 9.

(문화체육과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등발생요인			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 ☑ ( ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 응봉교 하부 체육공원 -

리틀야구연습장·족구장 조성계획

신설된 응봉교 하부에 기존 체육시설과 연계하여 리틀야구 연습장,

족구장을 설치하여 활기차고 건강한 지역사회를 이루고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

국민체육진흥법 제3조,제13조(체육 진흥 시책과 권장/체육시설의 설치 등)

2017년 생활체육시설 확충대상 사업계획서 제출(추가)

(문화체육과-16129호, 2016. 7. 18.)

※ 2017년도 추진예정 사업이었으나, 기존 체육시설과 연계하여 완성도를

높이고자 2016년에 조기 착공

Ⅱ		사 업 대 상

사업개요

❍ 위    치: 응봉동 234-3 일대

❍ 규    모

- 리틀야구연습장: 1면(60m×25m)

- 족구장: 5면(75m×25m)

❍ 사업기간: 2016. 9. ~ 2016. 12.

❍ 소요예산액: 294백만 원(시비)

- 리틀야구연습장(84백만 원) 족구장(210백만 원)

❍ 사업내용

- 리틀야구연습장(1면), 족구장(5면) 신설

리틀야구 연습장 · 족구장 경기장 예정 부지

확충필요성

❍ 구민의 체육활동 지원을 위한 지자체의 체육시설 설치·운영 책무 수행

❍ 구민 이용수요 대비 절대부족한 생활체육 시설을 확충하여

구민들의 건강증진과 삶의 질 향상을 지원하고,

❍ 생활체육 활성화 및 여가 증대를 통한 행복 성동 구현

시설부지 여건

❍ 입지현황

- 중랑천 하천 부지로 시설 조성이 용이하고 자연 친화적인 환경

- 거주 구민의 이용이 편리한 거리에 인접

❍ 주변현황

- 인근 살곶이 체육공원 체육시설(야구장, 물놀이장, 축구장, 인      라인 스케이트장 등) 및 응봉체육공원 체육시설(농구장, 축구전      용구장, 게이트볼장, 풋살장, 테니스장) 등과 어우러져 생활체      육 기반이 활성화 될 수 있는 여건 조성 및 발전 가속화 예상

Ⅲ		추 진 일 정

❍ 2016. 9.: 서울시에 예산 재배정 요청

❍ 2016. 10.: 기술용역 타당성 심사 의뢰, 설계용역

❍ 2016. 10.: 공사발주

❍ 2016.10. ~ 12.: 공사착공 및 준공

※ 세부일정은 예산 및 추진 여건에 따라 탄력적으로 조정

Ⅳ		행 정 사 항

문화체육과(주관부서)

❍ 기술용역 타당성 심사의뢰(서울시 기술심사담당관)

❍ 설계용역 및 공사 발주

안전치수과

❍ 공사감독

재무과

❍ 설계용역 및 공사 계약. 끝.