문서번호	정수과-4580
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박준호		김효상	09/09 최석기
협 조
	주무관			김유선
	주무관			최희정

염소용기 재검사 계약변경 계획보고

2016. 08

뚝도아리수정수센터

(정수과)

염소용기 재검사 계약변경 계획보고

우리 정수센터 염소용기 재검사와 관련 재검사 공정과정에서 염소용기 30병 중 7병이 불합격 판정 폐기되어 계약금액 감액 사항이 발생 하였기에 계약변경 후 재검사 처리코자 함

1	사업현황

❍ 계     약    명 : 염소용기 재검사

❍ 계약     개요 : 염소용기(1톤용) 30개 수리 및 안전검사

❍ 계약   기간 : 2016. 7. 13 ~ 2016. 9. 10

❍ 계약   금액 : 27,555,000원

❍ 계약상대자 : 우인화학(주) 대표 이범용

2	변경사항

❍ 변경 내용

- 염소용기 검사용기 30병 중 7병 불합격으로 잔여공정(메인밸브 부착,        안전밸브 부착, 누출시험비, 운송료 등) 미 진행으로 감액

❍ 변경 금액

- 변경 전/후 금액

구 분	당 초	변 경	감 액
공급가액	25,050,000	23,790,000	감) 1,260,000
부가가치세	2,505,000	2,379,000	감) 126,000
도급금액	27,555,000	26,169,000	감) 1,386,000
결정금액	27,555,000	26,169,000	감) 1,386,000

❍ 세부 물양 및 금액변경 내역 : 첨부 산출내역서 참조

3	조치계획

❍ 고압가스안전관리법 지정검사기관에서 염소용기 안전검사 결과        30병 중 7병 용기 넥클링 암나사 규격 미달로 인한 밸브체결 불가로       불합격 폐기처리 됨

❍ 정수장 현대화 사업으로 2011년 6월 염소용기 납품한 ㈜동방수기에      동등성능(용기 제조검사후 5년 미만)이상 용기 7병 납품요구

※ 참고, 평균사용기간 17년

❍ 준공전 검수 과정에서 일부 감액사항이 추가로 발생하여 변경 후       준공정산 처리코자 합니다.

붙임  1. 계약변경 산출내역서  1부.

2. 불합격용기 처리통지서  1부.

3. 변경계약 합의서 1부.  끝.