문서번호	시설보수과-7683
결재일자	2016.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	09/09 신응수

실정보고사항 검토 결과 보고

(2016년 도로시설물 일상유지보수공사 23차 작업지시(상계교 보수) 관련)

2016. 9.

북부도로사업소

(시설보수과)

실정보고사항 검토 결과 보고

(2016년 도로시설물 일상유지보수공사 23차 작업지시(상계교 보수) 관련)

우리 사업소에서 시행하고 있는『2016년 도로시설물 일상유지보수공사』23차 작업지시(상계교 보수)에 대하여 시공사로부터 실정보고한 사항 검토 보고임

관련근거

❍ 실정보고(23차 작업지시, 상계교 보수)〔정상개발(주)2016-9-46(2016.9.8.)〕

❍ 23차 작업지시(시설보수과-6877, 2016.8.22.)

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사

❍ 공사기간 : 2016. 3. 25. ∼ 2016. 12. 31.

❍ 도 급 액 : 금2,309,450,000원

❍  공사개요  :  균열보수 420m, 표면보수 3,870㎡, 단면보수 2,990㎡, 신축이음 교체 230m 등

❍ 도 급 자 : 정상개발(주) 대표 정동우

실정보고 내용

❍ 상계교 S2~S4구간에 공간비계 설치하여 근접조사 결과, 당초 작업지시 외 바닥판     하면, 캔틸레버부에서 콘크리트 열화로 인한 박리, 박락 및 철근노출 등 손상부가     추가 발견되어 구조물 안전성과 내구성 확보를 위해 보수 필요

❍ 교대(교각) 전 구간의 교좌장치 색상이 고정단, 가동단 구분 없이 단색(회색)으로      되어 있어 고정단(청색), 가동단(주황)으로 구분 필요

콘크리트 열화, 백태	콘크리트 철근노출	교좌장치(회색)

❍ 주요 공종 물량 내역

공종	규격	단위	물 량			비고
			당초	변경	증·감
그라인딩		㎡	960	1,830	증)870
고압물청소		㎡	1,284	2,278	증)994
열화면제거	기계(착암기),30mm	㎡	324	447	증)123
슈청소공	STEEL SEAL	개소	26	130	증)104
단면보수	E.G하이프로,T=30mm,천정	㎡	310	429	증)119
표면보수	E.G하이프로,T=0.6mm,벽체	㎡	220	274	증)54
표면보수	E.G하이프로,T=0.6mm,천정	㎡	740	1,557	증)817
강관배관	STS, D150	m	6	12	증)6

❍ 공사비 변경 내역

구분	당초	변경	증·감	비고
도급비	163,680,000	254,430,000	증)90,750,000

검토결과

❍ 일상유지 23차 작업지시(2015년 자체정밀점검 결과 조치) 관련, 공사 진행을       위해 공간비계를 설치하여 근접조사한 결과, 자체정밀점검에서 누락 및 추가     발생 된 콘크리트 박리, 박락 및 철근노출 등 손상부 보수를 위한 실정보고 사항으로

❍ 보수를 위해 기 설치한 공간비계를 활용하여 23차 작업지시에 누락 된(자체정밀     점검에서 누락 및 추가 발생 물량) 콘크리트 박리, 박락 및 철근노출 등 손상     부에 대해,

❍ 추후 별도로 보수 할 경우 공간비계 재설치에 따른 예산이 추가로 소요되어     비경제적으로 구조물 내구성 확보 및 예산 절감을 위하여 23차 작업지시에     포함하여 시행 함이 타당 함.

조치사항

❍ 구조물 안전성 및 내구성 확보, 공간비계 재설치에 따른 추가 발생 설치비 절감을      위해 23차 작업지시에 포함하여 공사를 시행하고 추후 설계변경시 반영하여     조치코자 함.

붙임 : 실정보고서 공문 1부.  끝.