투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	「2016년 건설근로자 안전관리시스템 구축 및 기술검증사업」용역 월간보고(8월)

1. 건설근로자 위치정보 기술검증사업 추진계획(본부장방침, 건설총괄부-27019호(2016.1.4.))와 관련입니다.

2. 「2016년 건설근로자 안전관리시스템 구축 및 기술검증 사업」을 진행 중에 있으며 2016년 7월 실적을 아래와 같이 보고합니다.

가. 사업개요

1) 계약건명 : 「2016년 건설근로자 안전관리시스템 구축 및 기술검증 사업」

2) 계약기간 : 2016.4.1. ~ 2016.12.31

3) 계약금액 : *********

4) 계약업체 : *******

나. 월간보고

1) 보고내용 : 2016년 8월 실적

2) 공 정 율 : 계획 61% / 실적 59.2%

3) 주요사항

구분	내용
2016.8월 추진실적	❍ 시범사업장(성동소방서) 변경 검토 - 결과 : 성동소방서로 유지 ❍ 건설현장 내 장비 설치 - 신림~봉천터널 건설현장 · 중계기, 수신기, 태그 설치 · 보안장비(VPN 구매 및 설치) ❍ 응용소프트웨어 테스트 - 중계서버, 위치측위서버, 관제시스템 ❍ 중간보고회 개최 - 날짜: 2016.8.23.(화) - 장소: 도시기반시설본부 10층 회의실 - 내용: 추진실적 및 향후계획
2016.9월 추진계획	❍ 건설현장 내 장비 설치 - 신림~봉천터널 확대구간 장비설치 중계기, 수신기 - 성동소방서 장비설치 · 네트워크, 중계기, 수신기, 태그 보안장비(VPN) 등 설치 ❍ 응용소프트웨어 테스트 - 중계서버, 위치측위서버, 관제시스템 - 연계 및 데이터전송 테스트 ❍ 신림~봉천터널 - 건설근로자 위치확인기능 검증 - 건설현장 인력관리기능 검증 계획 수립

붙  임 : 1. 월별공정보고서(2016.8월) 1부.

2. 보안점검 결과서(2016.8월) 1부.

3. 출근부(2016.8월) 1부.

4. 2016 용역사업 일정표 1부.  끝.

주무관	심계환		건설정보관리과장	정해민		건설총괄부장	09/09 김종근
협조자
시행	건설총괄부-19619	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2327	/		/	부분공개(5)