투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사(노면표시) 승인기간 연기

1. 토목부-18231(2016.09.02.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 요청한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인기간 연기요청에 대해 아래와 같이 변경승인하니, 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방」에 맞게  설치하여 주시고 T-Gis시스템 입력 후 준공확인 요청하여 주시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공 사 명		응봉교 확장 및 성능개선공사 교통안전시설 원인자부담 공사-노면표시	비 고
공사기간	당초	2016. 03. 04. ~ 2016. 06. 30.
	변경	2016. 03. 04. ~ 2016. 09. 20.
연기 사유		토목공정 지연에 따른 절대공기 부족

.끝.

주무관	박성민		도로보수과장	09/09 이상호
협조자	주무관	홍수종
시행	도로보수과-4395	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1539	/전송	2210-1549	/	sm7203@seoul.go.kr	/	대시민공개