문서번호	토목부-3397
결재일자	2014.2.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
남만조		이동훈	02/21 노우성
협조

폐기물처리용역 설계변경 검토보고(3차3회)

- 동부간선도로 확장공사 3공구  -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

도시기반시설본부

(토목부)

폐기물처리용역 설계변경 검토보고(3차3회)

- 동부간선도로 확장공사(3공구) -

본 공사 책임감리원으로부터 폐기물처리용역(3차분) 설계변경 요청이 있어 검토 보고함.

※ 관련근거 : 동엔 제2014-377(‘14. 2. 21)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로확장공사(3공구) 폐기물처리용역

○ 용역규모 : 폐콘크리트 55,515톤, 폐아스콘 15,903톤, 혼합폐기물 300톤

○ 용 역 비 : 930,979천원(3차 : 60,000천원)

○ 용역업체 : 인선이엔티(주)

□ 설계변경 검토

○ 폐기물처리용역 3차분에 대한 최종 정산 설계변경후 준공처리

○ 변경내역(3차3회)

구 분		당 초	변 경	증, 감
금 액 (원)		60,000,000	52,500,000	감)7,500,000
수 량 (ton)	폐콘크리트	2,260.00	2,190.60	감)69.40
	폐아스콘	2,337.00	2,823.32	감) 508.67
	혼합골재	15.60	15.60	-
기 간		‘12.03.12 ∼ ‘14.02.28	‘12.03.12 ∼ ‘14.02.28	변경없음

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 폐기물처리용역(3차) 최종 발생물량에 대하여 설계변경후 준공처리코자 합니다.

붙임 : 감리단 검토보고서 및 설계변경 내역서(3차3회) 각 1부.  끝.