문서번호	행정지원과-24033
결재일자	2016.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
손정훈	서경란	이만기	09/12 홍현구

『동부수도사업소 청사 증축공사』

기성검사(1회) 조서 제출에 따른 검토 보고

2016. 9. 12.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『동부수도사업소 청사 증축공사』

기성검사(1회) 조서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는『동부수도사업소 청사 증축공사』의 감리 업체인 예토 종합건축사사무소에서 기성검사(감독) 조서(1회)가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

❍ 위    치 : 성동구 고산자로10길 13(행당동142-1)

❍ 공사규모 : 지상 3층, 연면적 473.93㎡

❍ 공사기간 : 2016. 5. 19. ~ 2016. 10. 30.

❍ 계 약 자 : *************

❍ 계약금액 : 806,650,000원

□ 기성검사(1회) 개요

❍ 기성기간 : 2016. 5. 19. ~ 2016. 9. 5.

❍ 기성금액 : 191,365,420원

❍ 기성검사일 : 2016. 9. 7.

❍ 기성내역

(단위 : 원)

계약금액	기성금액			집행잔액	비고
	총계	전회(직접노무비)	금회(1회)
806,650,000	191,365,420	-	191,365,420	615,284,580

※기지급액 : 공사근로자 노무비 지급 - 61,413,000원

□ 검토사항

❍ 검토사항 : 기성 세부내역 타당성 검토

❍ 기성 세부내역(내역서 별첨)

(단위 : 원)

연번	비목	계약금액	기성금액(금회,1회)		집행잔액		비고
			금액(원)	비율(%)	금액(원)	비율(%)
1	재료비	212,475,251	41,023,033	19%	171,452,218	81%	타당
2	노무비	279,395,986	84,261,127	30%	195,134,859	70%	타당
3	경 비	86,423,121	22,678,132	26%	63,744,989	74%	타당
4	순공사원가	578,294,357	147,962,292	26%	430,332,065	74%	타당
5	일반관리비	34,697,661	8,877,737	26%	25,819,924	74%	타당
6	이윤	59,833,502	17,128,536	29%	42,704,966	71%	타당
7	공급가액	733,318,182	173,968,565	24%	559,349,617	76%	타당
8	부가가치세	73,331,818	17,396,856	24%	55,934,962	76%	타당
9	도급금액	806,650,000	191,365,421	24%	615,284,579	76%	타당

□ 조치 의견

❍ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로, 기성금 지급 등        후속 업무를 추진하고자 합니다.

붙 임 :1) 기성검사서류 1부.  끝.