투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2013년 도로굴착복구공사(연간단가))

1. 우리사업소에서 시행중인 「2013년 도로굴착복구공사(연간단가)」 의 정산 설계변경(최종) 시행에 따라 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 도로굴착 복구공사(연간단가)-서부

나. 공사기간 : 2013. 4. 8 ~ 2014. 2. 28.

다. 총공사비 : 1,785,887천원

라. 도 급 자 : (주)대연이엔씨 대표 이 종 식

마. 설계변경내역

구 분		설계변경 내역			비고
		당 초	변 경	증 ㆍ 감
총공사비		1,785,887,000	1,839,363,000	증)53,476,000
도급비	굴착복구공사	1,091,497,000	1,091,497,000	변경없음
	제설공	105,694,000	159,170,000	증)53,476,000
	계	1,197,191,000	1,250,667,000	증)53,476,000
관 급 비		523,452,000	523,452,000	변경없음
이 전 비		65,244,000	65,244,000	변경없음

바. 설계변경 사유

○ 제설작업(민간위탁용역) 물량 증가

사. 예산과목

연도별	예 산 과 목	금액(천원)	비고
2013년	합 계	1,839,363
	소 계	1,785,887
	도시안전실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비	1,435,641
	도시안전실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비	244,552
	도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비	103,694
	도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비	2,000
2014년	도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비	53,476

붙 임   1) 2013년 도로굴착복구공사(연간단가) 설계변경(정산) 시행 1부.

2) 설계변경(최종) 내역서 1부.

3) 설계변경(최종) 검토보고서 1부.

4) 제비율 검증표 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	최정필		도로보수과장	02/21 이규철
협조자	주무관	김영용
시행	도로보수과-1662	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개