투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사)

우리 본부에서 시행중인 『송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사」와 관련 공사기한 조정 사유가 발생하여 아래와 같이 계약변경 요청합니다.

가. 계약건명 : 송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사(1차)

나. 계약변경 요청 : 준공기한 연기

구 분	당 초		변 경		비 고
	총차	1차	총차	1차
계 약 자	주신공영(주)		변경사항 없음
계약금액	234,218,148원	110,000,000원	변경사항 없음
공사기간	2013.05.08. ~ 2014.07.20	2013.05.08.~ 2014.02.28	변경사항 없음	2013.05.08.~ 2014.07.20

다. 연기 사유 : 선행공정 지연에 따른 공기연장

라. 지체상금부과 여부 : 미 부과

마. 예산과목

하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 송정.사근 빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

붙임 : 준공기한 연기 검토보고서   1부. 끝.

	설비부장
주무관	김경남		건축설비과장	조예환		설비부장	02/21 박기형
협조자
시행	설비부-2099	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개