투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시장(교통운영과장)
(경유)
제목	실시설계도서 검토의견 제출(새문안로 중앙버스전용차로 공사)

1. 새문안로 중앙버스전용차로 설치 공사와 관련입니다.

2. `16.9.8. 실시설계 내역서 및 도면 사전 검토후 아래와 같이 검토의견을 회시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아  래

□ 설계내역서 검토결과

구분	검토결과	비고
누락	총괄내역서, 원가계산서, 보도포장 시공상세도, 도로청소 및 살수 비용, 사무실 및 창고임대료, 미확정공정, 감리 용역 발주시 필요한 보고서 등
변경	- 아스팔트 포장재(SMA, 1등급골재) 구입은 관급자재로 정상적으로 구입 불가능함에따라 사급으로 변경 (화강석 포함) - 측구는 야간 작업 어려움, 품질확보를 위해 기성 PC제품으로 변경 - 폐기물 처리용역 내역서 별도 작성 - 특허제품의 경우 특정제품선정위원회 심의 필요

□ 공사추진시 문제점

- 실시설계 준공후 행정절차이행등 최소 5.5월 소요되며, 동절기 굴착통제등으로

금년도 공사추진 어려움

- 중앙버스전용차로 설치 공사시 필요한 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역이 실시설계단계에서 미반영되어 있어 조속 시행 필요(행정2부시장 방침제282호)

- 공사시 추진할 경우 시공사 선정후 3.5월 이상 공사 중단됨.

※ 계약심사(0.5월) → 공사발주 (1.5월) → 소통대책수립 (2월)
→ 교통시설물   설치승인(노면, 표지판등, 1.5월), (최소 5.5월 소요)

붙임 : 관련 방침 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	09/12 김영수
협조자
시행	토목부-18869	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)