함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	관급자재 이형봉강 구매 계약변경(납품기한 연기) 요청

뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(이형봉강) 구매 계약과 관련하여 아래와 같이 변경 계약코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 이형봉강 구매

나. 계약업체 : 현대제철(주) 우유철

다. 계약금액 : 429,324,330원

라. 변경 내용 : 납품기한 연기

1) 납품연기 기한

- 당초 : 2016. 05. 30.(분할납품)

- 변경 : 2016. 12. 31.(분할납품, 214일 증가)

2) 연기사유 귀책 소재 : 업체에 해당없음

3) 납품기한 연기 사유

- 품질 및 자재관리, 안전관리, 현장관리에 만전을 기하고자 농축조                      구조물별 현장 자재사용 시기에 맞추어 자재 반입

따로붙임 : 1. 납품기한 연기 방침서 1부.

2. 책임건설사업관리자 현장실정보고 공문 1부. 끝.

	생산관리과장
주무관	신왕근		생산관리과장	09/12 한희선
협조자
시행	생산관리과-12971	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개