투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 전기공사)

우리 본부에서 추진중인 「마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사」관련, 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용 : 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		마포석유비축기지 재생 및 공원조성 전기공사(1차)
공사기간	총 차	2015.12.28.~2017.04.27.	2015.12.28.~2017.04.27.	변경 없음
	1차	2015.12.28.~2016.09.30.	2015.12.28.~2016.12.29.	증) 90일
계약금액	총차	1,236,997,480	1,236,997,480	변경 없음
	1차	100,000,000	100,000,000
계 약 자		㈜동부전기

나. 변경사유 : 선행(건축) 공종 연기

붙임  1. 공사기간 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	진종구		녹색성장과장	김창균		설비부장	09/12 권오식
협조자	계약1팀장	조현
시행	설비부-14292	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개