투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행<신내지하차도외 2개소 지하차도 조명등 개량공사>

1. 우리사업소에서 시행중인 “신내지하차도외 2개소 지하차도 조명등 개량공사”의 설계변경 사유가 발생되어 아래와같이 변경시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 신내지하차도외 2개소 지하차도 조명등 개량공사

나. 도 급 자 : 서영전기 장종혁

다. 공사기한 : 2016. 7. 1 ~ 2016. 9.28

라. 계약금액 : 금142,519,130원

마. 변경사유 : 공사물량 증감에 따른 설계변경

바. 변경금액                                             (단위 : 원)

변경 전	변경 후	증감액
142,519,130	132,209,000	감10,310,130

사. 예산과목 :

안전총괄본부/도로시설과, 도로시설물관리, 기전시설물관리, 노후조명설비개선사업, 시설비

첨부 : 1. 공사설계변경 실정 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(갑, 을) 각 1부.

3. 제비율 검증표 1부. 끝.

주무관	문준호		기전과장	박심근		성동도로사업소장	09/13 이종엽
협조자	관리단속과장	박영종		계약1팀장	조현
시행	기전과-7288	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1547	/전송	02-2210-1536	/	munjunhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)