서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 공기연장 허가신청(알림)

1. 소방행정과-14591(2016.6.7.)호「계약체결 통보(2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사)」

2. 2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사와 관련 시공계약업체의 공기연장 요청에 따라 다음과 같이 공사기한을 연장하고자 합니다

가. 공 사 명 : 2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사(연간단가)

나. 공사업체 : 주식회사 크린텍개발

다. 공사기한 : 2016. 5. 31 ~ 9. 30(계약후 122일)

라. 요청사유 : 우천으로 인한 시공 지체

마. 연장일수 : 37일(2016.11.7까지)

바. 검토의견 : 행정자치부 예규 제40호「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 의거 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유(공기 중 우천)로 인하여 지체된 경우에 해당됨으로 공기연장 신청을 허가함이 적합하다고 사료됨.

붙  임 : 1. 공기연장신청서 및 기상현상증명서(기상청) 1부.

2. 공기연장 합의각서 1부.  끝.

	재난대응과장
담당자	강병욱		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	09/13 김학준
협조자
시행	재난대응과-18863	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1412	/전송	02-3706-1419	/	kapawho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)