문서번호	도로보수과-4493
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
김용면		이상호	09/19 이종엽
협조

설계변경 검토보고(2회)

【2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

설계변경 검토보고(2회)

【2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)】

우리사업소에서 시행중인 『2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사

(연간단가)』시행 중 맨홀 정기점검 계획 및 하반기 정기점검(외부)

조사비(58,000천원) 반영에 따른 설계변경 검토보고 사항임.

□ 관련근거

○ 맨홀점검계획 및 예산 재배정 통보 : 도로관리과-12641(2016.8.9.)

○ 2016년 맨홀관리 및 정기점검 계획 : 도로보수과-4381(2016.9.9.)

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016. 4. 7 ~ 2016. 12.31

○ 착 공 일  : 2016. 4. 7

○ 준공예정일 : 2016. 12.31

○ 도 급 자 : ㈜우암건설 대표 고원준

○ 도 급 비 : 428,829,500원

○ 공사개요

- 불량맨홀정비 : 521개소

․ 주간 282개소, 야간 239개소

(하수도 : 147개소, 상수도 99개, 통신 등 기타 275개소)

□ 변경 사유

○ 2016년 하반기 정기점검(맨홀외부) 조사비(58,000천원) 반영

○ 공사비 증․감

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	433,829,500	491,829,500	0
도급비	428,829,500	486,829,500	0
이전비	5,000,000	5,000,000	0

□ 예산과목

○ 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 맨홀정기(외부) 조사비를 반영 예산범위내에서 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 변경내역서 1부. 끝.