서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시내버스 정류소 임시이전 일정 변경

1. 버스정책과-18833(2016.9.9.)호 및 노원구교통행정과-49954(2016.9.19.)호와 관련입니다.

2. 노원구 관내 지하철7호선 중계역 E/S 설치와 관련하여‘16년 9월 22일(목)자로 시내버스정류소 임시이전을 승인하였으나

3. 다음과 같이 시내버스 정류소 임시이전 일정이 변경되어 통보하오니,

관련기관 및 운수회사는 시민불편이 없도록 소관사항 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍  니다.

가. 정류소 임시이전 변경 내역

정류소ID	정류소명	정차현황	임시이전일정		이전 위치	변경사유
			당초	변경
11-366	중계역	100,105 146,N13 N61,1135 1137,1140	2016.9.22. (목) 첫차부터	운행개시일 추후통보	도로교통공단 교차로 방면 45m 이전	임시정류장 설치를 위한 수목 등 주변지상물의 이설기간 소요

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교통정보과장,노원구청장(교통행정과장),서울시버스운송사업조합,한국스마트카드,한성여객,흥안운수,진아교통,삼화상운,한국비알티자동차
주무관	오병환		정류소관리팀장	김광형		버스정책과장	09/19 이상훈
협조자
시행	버스정책과-19336	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2287	/전송	02-2133-1049	/	ohswh1@seoul.go.kr	/	대시민공개