문서번호	시설보수과-6830
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박국남	09/19 송만규
협조

서부교 상부 임시열배관 존치기한 연장에 대한 검토보고

동부도로사업소

(시설보수과)

「서부교 상부」

임시열배관 존치기한 연장에 대한 검토보고

서부교 상부에 매설되어 있는 임시열배관에 대하여 금년 내 이설할 경우, 위례신도시 내 열공급 중단이 불가피하여 민원발생 우려가 있고 우기철(5.15~10.15) 하천횡단 공사가 곤란하므로 존치기한 연장요청이 있어, 이에 대한 검토결과를 보고하는 것임.

관련근거

○ 위례에너지서비스(주) 제2016-S00369호(2016. 8. 5)

⇒ 열배관 존치기한 연장 협조 요청

시설물 현황

시설명	준공일	규 모	구조형식	설계하중	노선명	비고
서부교	1987. 6.30	B=25.0m L=22.1m	상부 : 라멘 하부 : 벽식	DB-24	거여동길

공사현황

○ 공사개요

- 당초(교량하부) : 이중보온관(600㎜) 2열, 가스관(500㎜) 1열, L=44m

※ 세미 쉴드(Semi-Shield)공법 추진

- 변경(교량상부) : 이중보온관(600㎜) 2열, L=33m

○ 공사기간 : 2015.10 ~ 11.30

○ 발 주 처 : 위례에너지서비스(주)

○ 시 공 사 : ㈜정호이앤씨

추진경위

- 2015. 9.03 : 서부교 압입횡단 열배관공사 승인 요청(교량하부 압입횡단)

- 2015.10. 1 : 공사 착공

- 2015.10.30 : 공사중단

※ 중단사유 : 강관 압입 추진 중 교량 기초저판 하부에 매설되어 있는 고지배수로 박스시설(3.5m×3.5m)이 저촉되어 강관압입 추진 불가

- 2015.11.05 : 서부교 상부 횡단 열배관공사 검토 요청

- 2015.11.27 : 검토 요청에 대한 회신

※ 회신내용 : 교량상부 임시매설관은 2016. 3.30까지 한시적으로 존치하며,

기간이 경과된 후에는 당초 계획대로 시행.

단, 사정에 의해 임시매설관 존치기한 연장시 사업소와 별도 협의

- 2016. 3.21 : 서부교 상부 횡단 열배관 조치계획서 제출(←위례에너지서비스)

〔공증인가 : 동남합동법률사무소(등부 2016년 제768호)〕

- 2016. 3.28 : 서부교 상부 횡단 열배관 조치계획서 제출에 대한 회신

※ 회신내용 : 귀사에서 제출한 공정표에 따라 상부 임시열배관 철거 및 원상복구할 것

- 2016. 7.21 : 존치기한 연장에 대한 협의

※ 참석자 : 소장, 시설보수과장, 업무담당(동부도로사업소)

류성선본부장, 강혜수팀장, 홍진기차장(위례에너지서비스(주))

존치기한 요청사유

○ 임시열배관 이설공사 기간동안 위례신도시 내 열공급 중단(4일)으로 위례신도시 내 주민의 민원 발생

○ 우기철(5.15~10.15) 공사로 인하여 하천횡단에 따른 안전사고의 위험 상존

검토의견

○ 위례신도시에 공급하는 열배관공사는 위례신도시 건설에 따른 공공사업으로써 2017. 4월 위례신도시 내 열병합발전시설이 완공되면 독립적으로 열공급이 가능하므로 위례에너지서비스(주) 요청대로 2017.12.10일까지 연장토록 하되,

○ 교량 구조물(서부교) 및 상부 임시열배관 안전성을 위하여 순찰 및 점검을 강화토록 하고, 동기간 중 발생하는 모든 피해에 대하여 민형사상 책임은 위례에너지서비스(주)에서 지도록 함.

○ 위 사항 등을 공사허가 조건으로 회신코자 함.

붙 임  1. 공사허가 조건 1부.

2. 관련공문(공증인가 인증서 포함) 1부. 끝.