문서번호	기반시설과-3773
결재일자	2016.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
이건용		09/20 박일연
협조

실정보고 검토 보고

-서부이촌동 보행육교 설치 전기공사-

2016. 09.

한강사업본부

(기반시설과)

실정보고 검토 보고

<서부이촌동 보행육교 설치 전기공사>

「서부이촌동 보행육교 설치 전기공사」추진 중 서울시설공단으로부터 공사실정 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2016년 서부이촌동 보행육교 설치 전기공사

○ 공사기간: ‘16. 5. 4. ~ ’17. 5. 3.

○ 공사규모: 경관조명 및 CCTV 설비공사

○ 도 급 액: 187,426천원

○ 시 공 사: 진경파워콤 주식회사(표명숙)

○ 감독위탁: 서울특별시시설관리공단(도로감독3처)

□ 실정보고 내용

공종	현황 및 문제점	대책	검토결과	개략금액 (천원)
철거 공사	기존 보안등 철거(5m) 후 고재처리 계약되어 있으나, 관리청(용산구청 도로과)에서 반납요구	용산구청 반납 후 고재물량 설계 변경 시 반영	적정	증 5,000
	기존 보안등 재사용철거 1본(50W) 이었으나 실제 설치 수량 2본	2본으로 설계 변경 시 반영	적정
	강제전선관 및 케이블 철거작업이 토목과 중복되어 제외	철거 물량 제외 후 설계변경 시 반영	적정
	가설작업시 자동차 전용도로 교통 통제 안내표지판 및 싸인카	교통통제 작업 후 설계 변경 시 반영	적정

공정	현황 및 문제점	대책	검토결과	개략금액 (천원)
전기 공사	가설 케이블이 개별설치(4라인)로 되어 있으나, 현장 여건상 과하게 비용이 들어감	메인 간선을 1라인으로 교체후 분기하여 사용하고 육교 설치 후 본 전원 공급시 개별 포설 설치 (설계변경 시 반영)	적정	감 2,000
	광통신케이블이 철거분으로 잡혀있으나 통신사에서 자제적으로 이설(KT, LGU+)	철거 및 설치물량 제외. 설계 변경 시 반영	적정
	가공 전주를 2본 설치하도록 설계되었으나 현장 여건 고려 1본만 설치 사용	1본만 설치 후 가공 작업 설계 변경 시 반영	적정

□ 조치계획

○ 상기 검토 결과와 같이 보고내용을 승인처리하고 설계변경 시

반영하고자 함

붙임: 실정 검토보고서 1부.  끝.