급수공사 준공기한 연기 계획 보고

등록번호	급수운영과-20881

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박재성	代김용만	09/21 김수영

명에 의하여 급수공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생하여 급수공사 기한을 연기 조치하여 급수공사 시행에 철저를 기하고자 합니다.

2016. 9. 21.

복 명 자 : 지방시설9급  박 재 성

중부수도사업소장 귀하

1. 현 황

위치	지시번호	공사공종	공사기간
***********	신설-36번	신규급수공사	16.09.07 ~ 09.13

2. 연기사유

○ 상기 위치는 민원인으로부터 신설 요청을 받아 2016.08.27. 급수공사비를 납부하여 2016.09.06. 작업지시한 사항임.

○ 시공업체에서 급수공사를 시행코자 2016.09.08. 현장방문결과 건축용 비계를 철거하지 않아 공간 미확보 되어 급수공사 시행이 불가하여 수요가와 공사일정을 협의한바 2016.09.22. 이후 급수공사 요청이 있으므로 부득이 공사 기한을 연기해야 할 실정임.

3. 조치의견

○ 상기와 같은 실정에 따라 공사기한을 2016.09.26.까지 연기하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다. 끝.