문서번호	기전과-10174
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
장병준		양영민	09/21 한동근
협조

설 계 변 경 보 고

(공공자전거 운영지역내 안전시설 확충 교통안전표지 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

서부도로사업소

(기전과)

설 계 변 경 보 고

(공공자전거 운영지역내 안전시설 확충 교통안전표지 설치공사)

세종대로 등 11개노선 공공자전거 운영지역내 자전거우선도로 표지판 설치공사에 대해 설계변경 요청문서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련문서

○ ㈜건영이앤씨 건영 본 16-09-13호(2016.9.13.)

- 설계변경 요청서류 제출(건)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 공공자전거 운영지역내 안전시설 확충 교통안전표지 설치공사

○ 공사위치 : 세종대로 등 11개노선

○ 공사내용 : 자전거우선도로 표지판(700*1190) 178개 설치

○ 계약금액 : 금74,472,680원

○ 공사기간 : 2016.7.6. ∼ 2016.10.30.

○ 계약업체 : ㈜정진로드스틸 대표 성진한

○ 감리업체 : ㈜건영이앤씨

□ 변경내용 및 승인여부

주요내용	승인여부
건강, 연금, 노인장기요양보험료 정산감액	승인
안전관리비 정산감액	승인

□ 설계변경금액(총괄)                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
도급비	74,472,680	72,420,000	감)2,052,680

□ 조치의견

○ 감리자가 제출한 설계변경 검토의견서 내용이 적정한 것으로 판단되어

이를 승인하고 관리단속과로 설계변경 계약을 의뢰하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 요청서류 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.