문서번호	기전과-4930
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
전상은		유재옥	09/21 이덕기
협조
	주무관		김용문

『2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사』

준공기한 연기 검토보고

2016. 09.

남부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사』

준공기한 연기 검토보고

우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2016년 교통사고 잦은 곳 개선 전기공사(교통신호기)』에 대해 책임감리로부터 준공기한 연기 요청있어 아래와 같이 검토 및 조치코자 합니다.

Ⅰ	공사 현황

공사명 : 2016년 교통사고 잦은 곳 개선 전기공사(교통신호기)

공사개요 : 교통신호등(주) 신설/이설/철거 및 제어기 이설

도급액 : 금195,234,090원

도급업체 : 가인전력(주) 대 표 김 윤 수

공사기간 : 2016. 06. 27. ~ 09. 30.

책임감리 : 주식회사 트랙픽스 대 표 김 희 수

Ⅱ	보고 내용

준공기한 검토의견

보 고 내 용	감 리 의 견	검 토 의 견	비 고
굴착허가(서초구) 지연으로 인한 공기 부족	준공기한 연기 필요	감리의견 수용

준공기한 변경내용

계 약 금 액	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
변동없음	2016.06.27. ~ 09.30.	2016.06.27. ~ 11.30.

Ⅲ	보고자 의견

상기 공사건에 대해 설계변경(준공기한 연기)를 시행하여 사업준공에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 준공기한연기 실정보고 내역 1부. 끝.