함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리 용역)

1. 생산관리과-12620호(’16.09.06) 및 한국종합기술 2016-9-498호(’16.08.29)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하고 있는 『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리 용역』건의 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리 용역

나. 용역기간 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 12. 31.

다. 도 급 비 : 184,272,890원

라. 도 급 자 : 목화산업㈜ 외 1개사

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

사. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비고
공급가액	167,520,809	216,090,000	증	48,569,191
부가가치세	16,752,081	21,609,000	증	4,856,919
도 급 비	184,272,890	237,699,000	증	53,426,110

아. 계약금액 조정 사유

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사의 설계변경 수량 변경에 따른 폐기물                   처리물량 변경 반영

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	신왕근		생산관리과장	한희선		생산부장	代한희선		상수도사업본부부본부장	09/21 정중곤
협조자	주무관	이경선		주무관	김성민		재무회계과장	박병식
시행	생산관리과-13346	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개