	서울시립과학관
수신	더 쉐이크 크리에이티브 *** 대표 귀하
(경유)
제목	서울시립과학관 전시설계 관련 총괄계획가(MP) 활동기간 재연장 요청

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조해 주심에 깊이 감사드립니다.

2. 귀하께서 총괄계획가(MP)로 활동중인 「서울시립과학관 전시설계 및

제작·설치 용역」의 준공기한이 연장됨에 따라, 총괄계획가(MP)의 활동기간을 아래와 같이 재연장하고자 하오니, 본 용역을 성공적으로 완수 할 수 있도록 많은 협조 부탁드립니다.

- 아    래 -

가. 대 상 자 : ********************

나. 총괄계획가(MP) 활동 재연장기간

- 당  초 : 2015년 1월 ~ 2016년  2월(14개월)

- 연  장 : 2015년 1월 ~ 2016년  9월(21개월, 당초 대비 7개월 증)

- 재연장 : 2015년 1월 ~ 2016년 12월(24개월, 연장 대비 3개월 증)

※ 향후 전시용역 진행 일정에 따라 조정 가능

다. 총괄계획가(MP) 기능 및 역할 : 전시설계 및 제작·설치 총괄

라. 활동수당 지급 : 월 232만원(소득세 포함, 기존과 동일).  끝.

	서울시립과학관장
주무관	이진원		전시과장	代이진원		서울시립과학관장	09/22 代김호식
협조자
시행	전시과-876	(		)	접수		(		)
우	01792	서울특별시 노원구 한글비석로 168 (하계동)	/
전화	02-970-4531	/전송	02-970-4597	/	icefiree33@seoul.go.kr	/	부분공개(6)