투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경(연기) 요청 - 아스팔트콘크리트

1. 시설보수과-5041호(2016.6.20.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『구로역지하차도보수공사』에 소요되는 관급자재 에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경(연기)요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 아스팔트콘크리트

나. 계약자 : 경기서부인천아스콘협동조합

다. 납품기한 변경(연기) 내역

품 명	물품 식별번호	규 격	단위	수량	납품기한
					당초	변경
아스팔트콘크리트	22535447	WC-4, t=20㎜, 가열, 3등급,표층용	ton	350	2016.9.30	2016.11.15

라. 변경사유 :『건설폐기물 운반 및 처리용역』계약 지연에 따른

절대공기 부족

마. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 구로역지하차도보수, 시설비 및 부대비, 시설비.  끝.

	시설보수과장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 09/22 박병연
협조자
시행	시설보수과-7909	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개